2025년 국토도시본부 사업계획

□ 사업물량 및 사업비 등

부문		사업내용		사업물량			사업비(개소)
토지		지구지정		10,730	천㎡		5	개소
		지구계획		15,835	천㎡		9	개소
		취 득		2,423	천㎡		29,888	억원
		조 성		5,740	천㎡		29,032	억원

□ 조성공사 착공계획

(단위 : 천㎡)

지역본부	지구명	사업유형	사업면적	착공월
5개 지구 (공공주택 4, 민간임대 1)			2,888	-
경기남부	용인언남	공공지원민간임대	905	‘25.03
경기북부	고양탄현공원	공공주택	423	‘25.05
경기남부	안양매곡	공공주택	112	‘25.06
경기남부	수원당수2	공공주택	704	‘25.06
경기남부	화성어천	공공주택	743	‘25.12

□ 조성공사 준공계획

(단위 : 천㎡)

지역본부	지구명	사업유형	사업면적	준공월
5개 지구 (공공주택 4, 택지개발 1)			4,499	-
인천	인천가정2	공공주택	263	‘25.06
경기남부	수원당수	공공주택	948	‘25.11
인천	부천괴안	공공주택	139	‘25.11
서울	수서역세권	공공주택	386	‘25.12
경기남부	오산세교2	택지개발	2,763	‘25.12