LH공사 도시개발사업 추진 현황

(`22.3월 기준)

□ 16개 지구, 17.6백만㎡(532만평) 규모의 도시개발사업 추진 중

ㅇ 16개 지구 중 국토부 인허가 대상은 고양덕은 등 4개 지구

* 고양덕은, 화성병점, 칠곡북삼(환지), 아산탕정2

□ 사업지구 총괄표

* 범례: (국토부 인허가) 4개 지구, (환지방식) 5개 지구

구분	본부	지구명	면적 (천㎡)	세대 (호)	[토지] 주요일정						[주택] 주요일정
					구역지정	개발계획	실시계획	보상착수	공사착공	사업준공	주택착공	최초입주
총계		16개 지구	17,582	92,776
진행중	합계	11개 지구	10,930	55,930
	공사중(10)		10,758	54,850
	서울	성동행당	71	495	’05.12	’05.12	’08.07	’07.12	’09.02	’22.12	-	-
	경기	화성병점	376	1,588	’05.12	’07.12	’10.04	’09.09	’16.03	’22.12	’19.12	’22.04
	인천	루원시티	906	9,440	’06.08	’06.08	’16.09	’08.06	’16.12	’22.06	’18.09	’22.01
	인천	고양덕은	646	4,815	’10.05	’12.05	’15.12	’15.12	’16.12	’22.09	’19.12	’22.04
	인천	광명유통	297	-	’18.02	’18.02	’20.05	’20.12	’21.07	’24.12	-	-
	인천	부천운동장	490	1,533	’17.12	’17.12	’21.01	’21.10	’21.11	’24.12	’24.12	’27.10
	충남	내포신도시	6,172	27,350	’07.07	’08.05	’09.03	’08.05	’11.08	’22.12	’12.12	’15.09
	경북	칠곡북삼	791	4,956	’05.12	’07.12	’16.12	’18.03	’20.12	’23.12	-	-
	경북	구미거의2	72	127	’14.10	’14.10	’18.05	’19.11	’20.11	’23.12	-	-
	전남	광주효천1	937	4,546	’05.12	’08.01	’08.12	’08.09	’14.05	’22.06	’17.12	’19.01
	보상중(1)		172	1,080
	전북	남원구암	172	1,080	’19.07	’19.07	’20.08	’21.10	’23.07	’27.03	-	-
보상미착수	합계	5개 지구	6,652	36,846
	충북	충주안림	476	2,682	’19.02	’21.01	’23.06	’23.03	’24.06	’27.08	’25.04	’27.05
	충북	진천성석	371	2,651	’19.03	’21.02	’22.09	’23.03	’23.08	’26.09	’24.05	’26.04
	충남	대전연축	242	1,435	’20.05	’22.05	’23.11	’22.12	’24.10	’26.12	’24.12	’27.01
	충남	아산탕정2	3,572	21,091	’20.08	’22.08	’23.12	’23.03	’24.03	27.06	’25.12	’28.04
	전남	목포임성	1,991	8,987	’13.10	’15.10	’21.01	’23.04	’24.01	’27.12	’25.06	’28.01

* 사업지구의 위치도 및 토지이용계획도는 “LH홈페이지 > 주요사업 > 도시조성사업 > 신도시 조성” 에서 확인할 수 있습니다.

(LH홈페이지 : www.lh.or.kr)