LH공사 도시개발사업 추진 현황

(`25.7월 기준)

□ 19개 지구, 20.4백만㎡(616만평) 규모의 도시개발사업 추진 중

ㅇ 19개 지구 중 국토부 인허가 대상은 고양덕은 등 4개 지구

* 고양덕은, 화성병점, 칠곡북삼(환지), 아산탕정2

□ 사업지구 총괄표

구분	권역	지구명	면적 (천㎡)	세대 (호)	주요일정
					구역 지정	개발 계획	보상 착수	실시 계획	공사 착공	사업* 준공
총 계		19개지구	20,367	109,528
진행중	합계	17개지구	18,194	100,677
	공사중(13)		13,237	68,762
	서울	성동행당	71	495	'05.12.	'05.12.	'07.12.	'08.07.	'09.02.	'25.12.
	인천	루원시티	906	9,440	'06.08.	'06.08.	'08.06.	'16.09.	'16.12.	'25.12.
		고양덕은	647	4,815	'10.05.	'12.05.	'15.12.	'15.12.	'16.12.	'26.03.
		광명유통	297	-	'18.02.	'18.02.	'20.12.	'20.05.	'21.07.	'26.05.
		부천운동장	491	1,363	'17.12.	'17.12.	'21.10.	'21.01.	'21.10.	'26.12.
	경기	화성병점	377	1,588	'05.12.	'07.12.	'09.09.	'10.04.	'16.03.	'26.12.
		남양주양정	2,063	12,331	'19.03.	'21.03.	'21.06.	'22.12.	'24.02.	'27.12.
	대전	내포신도시	6,172	26,791	'07.07.	'08.05.	'08.05.	'09.03.	'11.08.	'25.12.
		대전연축	241	1,220	'20.05.	'22.03.	'22.11.	'24.04.	'25.06.	'26.12.
	대구	칠곡북삼	791	4,956	'05.12.	'07.12.	'18.03.	'16.12.	'20.10.	'25.12.
		구미거의2	72	137	'14.10.	'14.10.	'19.11.	'18.05.	'20.12.	환지처분일
	광주	광주효천1	937	4,546	'05.12.	'08.01.	'08.09.	'09.01.	'14.05.	'23.03.
	전북	남원구암	172	1,080	'19.07.	'19.07.	'21.10.	'20.08.	'23.09.	'28.05.
	보상중(4)		4,959	31,915
	충북	진천성석	371	2,351	'19.03.	'21.03.	'25.06.	'22.11.	'26.06.	'25.12.
	충북	충주안림	475	2,552	'19.02.	'21.01.	'23.07.	'24.07.	'25.12.	'30.12.
	대전	아산탕정2	3,571	22,151	'20.08.	'22.12.	'24.08.	'25.09.	'26.05.	'29.12.
	강원	춘천다원	542	4,861	‘22.11.	‘22.11.	‘24.12.	‘25.07.	'26.08.	'28.12.
보상미착수	합계	2개지구	2,171	8,851
	경남	통영폐조선소	180	482	‘23.06.	‘23.06.	‘25.10.	‘25.07.	‘26.12.	'26.12.
	광주	목포임성	1,991	8,369	'13.10.	'15.10.	'26.01.	'21.01.	'26.10.	환지처분일

* 사업준공은 인허가 승인된 사업 일정으로 추진여건에 따라 변동될 수 있음

※ 사업지구의 위치도 및 토지이용계획도는 “LH홈페이지(www.lh.or.kr) > 사업소개 > 토지사업 > 신도시 조성” 에서 확인할 수 있습니다.