LH공사 도시개발사업 추진 현황

(`26.3월 기준)

□ 15개 지구, 12.0백만㎡(361만평) 규모의 도시개발사업 추진 중

ㅇ 15개 지구 중 국토부 인허가 대상은 고양덕은 등 4개 지구

* 고양덕은, 화성병점, 칠곡북삼(환지), 아산탕정2

□ 사업지구 총괄표

범례: (국토부 인허가) 4개 지구, (환지방식) 3개 지구

권역	지구명	면적 (천㎡)	세대 (호)	주요일정
				구역 지정	개발 계획	보상 착수	실시 계획	공사 착공	사업 준공
총 계	15개지구	11,950	72,633
공사중(11)		6,991	41,834
서울	성동행당	71	495	'05.12.	'05.12.	'07.12.	'08.07.	'09.02.	'26.12.
인천	루원시티	906	9,440	'06.08.	'06.08.	'08.06.	'16.09.	'16.12.	'26.12.
	고양덕은	647	4,815	'10.05.	'12.05.	'15.12.	'15.12.	'16.12.	'27.03.
	광명유통	297	-	'18.02.	'18.02.	'20.12.	'20.05.	'21.07.	'26.05.
	부천운동장	491	1,363	'17.12.	'17.12.	'21.10.	'21.01.	'21.10.	'26.12.
경기	화성병점	377	1,588	'05.12.	'07.12.	'09.09.	'10.04.	'16.03.	'26.12.
	남양주양정	2,062	12,331	'19.03.	'21.03.	'21.06.	'22.12.	'24.02.	'29.12.
대전	대전연축	241	1,220	'20.05.	'22.03.	'22.11.	'24.04.	'25.07.	'26.12.
경북	칠곡북삼	790	4,956	'05.12.	'07.12.	'18.03.	'16.12.	'20.10.	'26.09.
광주	광주효천1	937	4,546	'05.12.	'08.01.	'08.09.	'09.01.	'14.05.	'26.12.
전북	남원구암	172	1,080	'19.07.	'19.07.	'21.10.	'20.08.	'23.09.	'28.05.
보상중(4)		4,959	30,799
충북	진천성석	371	2,351	'19.03.	'21.03.	'25.06.	'22.11.	'27.03.	'31.03.
충북	충주안림	475	2,552	'19.02.	'21.01.	'23.07.	'24.07.	'26.10.	'30.12.
대전	아산탕정2	3,571	21,035	'20.08.	'22.12.	'24.08.	'25.09.	'26.06.	'29.12.
강원	춘천다원	542	4,861	‘22.11.	‘22.11.	‘24.12.	‘25.07.	'26.10.	'28.12.

* 사업 주요일정은 인허가 변경 등 추진여건에 따라 변동될 수 있음

※ 사업지구의 위치도 및 토지이용계획도는 “LH홈페이지(www.lh.or.kr) > 주요사업 > 도시조성사업 > 신도시 조성” 에서 확인할 수 있습니다.