LH공사 도시개발사업 추진 현황

(`23.8월 기준)

□ 17개 지구, 18.1백만㎡(548만평) 규모의 도시개발사업 추진 중

ㅇ 17개 지구 중 국토부 인허가 대상은 고양덕은 등 4개 지구

* 고양덕은, 화성병점, 칠곡북삼(환지), 아산탕정2

□ 사업지구 총괄표

* 범례: (국토부 인허가) 4개 지구, (환지방식) 5개 지구

구분	권역	지구명	면적 (천㎡)	세대 (호)	[토지] 주요일정						[주택] 주요일정
					구역 지정	개발 계획	보상 착수	실시 계획	공사 착공	사업 준공	주택 착공	최초 입주
총 계		17개지구	18,123	98,039
진행중	합계	12개지구	11,172	56,817
	공사중(10)		10,758	54,302
	서울	성동행당	71	495	'05.12	'05.12	'07.12	'08.07	'09.02	`23.12	-	-
	인천	루원시티	906	9,440	'06.08	'06.08	'08.06	'16.09	'16.12	`23.12	‘18.09	‘22.01
	인천	고양덕은	646	4,815	'10.05	'12.05	'15.12	'15.12	'16.12	`23.12	‘19.12	‘22.04
	인천	광명유통	297	-	`18.02	`18.02	`20.12	`20.05	`21.07	`24.12	-	-
	인천	부천운동장	490	1,533	'17.12	'17.12	'20.10	'21.01	'21.11	`24.12	‘25.06	‘28.04
	경기	화성병점	376	1,588	'05.12	'07.12	'09.09	'10.04	'16.03	`24.12	‘19.12	‘22.04
	대전	내포신도시	6,172	26,802	'07.07	'08.05	'08.05	'09.03	'11.08	`24.12	‘12.12	‘15.09
	대구	칠곡북삼	791	4,956	'05.12	'07.12	'18.03	'16.12	'20.10	`23.12	-	-
	대구	구미거의2	72	127	'14.10	'14.10	'19.11	'18.05	'20.11	‘23.12	-	-
	광주	광주효천1	937	4,546	'05.12	'08.01	'08.09	'09.01	'14.05	`23.03	‘17.12	‘19.01
	보상중(2)		414	2,515
	대전	대전연축	242	1,435	'20.05	'22.03	'22.11	'24.03	'24.12	`27.12	‘25.12	‘27.09
	전북	남원구암	172	1,080	'19.07	'19.07	'21.10	'20.08	'23.07	`27.04	-	-
보상미착수	합계	5개지구	6,951	41,222
	대전	아산탕정2	3,571	22,151	'20.08	'22.12	'23.11	'24.12	'25.12	`29.12	‘26.12	‘29.07
	충북	충주안림	476	2,742	'19.02	'21.01	'23.07	'23.09	'24.06	`28.12	‘25.10	‘28.02
	충북	진천성석	371	2,618	'19.03	'21.03	'24.03	'22.11	'24.09	`27.09	‘25.05	‘27.04
	광주	목포임성	1,991	8,987	'13.10	'15.10	'23.10	'21.01	'24.10	`27.12	‘25.06	‘28.01
	강원	춘천다원	542	4,724	‘22.11	‘22.11	‘24.09	‘24.08	‘25.04	‘28.12	‘27.04	‘29.12

* 사업지구의 위치도 및 토지이용계획도는 “LH홈페이지 > 주요사업 > 도시조성사업 > 신도시 조성” 에서 확인할 수 있습니다.

(LH홈페이지 : www.lh.or.kr)