< 조경설계 및 조경공사 발주 업무프로세스>

(‘23.06)

순서		Process				주요 업무내용		소요시간
0		용역발주 준비				- 내부발주방법 결정(공모, PQ, 협력) - 용역비 설계내역서 작성		-
1		발주계획 수립				- 사업계획실 협의 ․추정금액 5억이상 기술용역 ․추정금액 20억이상 일반공사(조경공사) 10억이상 전문공사		약 2개월
2		발주방법 결정				- 기술심사처 발주방법 심의 ․당해연초 일괄 시행(현상공모 여부)		약 1개월
3		조경설계용역 발주시행		계약 심사		- 기술심사처 협의 ․단지개발업무 관련 추정금액 2.5억원 이상 기술용역		약 1개월
				사업 협의		- 사업주관부서 협의 ․추정금액 5억이상 본사 주관부서에서 발주하는 용역
						- 사업계획실 협의 ․추정금액 5억이상 본사 주관부서에서 발주하는 용역
4		일상 감사				- 발주할 용역 일상감사 ․추정금액 2.5억이상 건설기술용역		약 0.5개월
5		현상공모				- (발주시행 후)현상공모 공고 ․응모, 접수, 심사 등		약 4개월
6		발주의뢰 및 용역계약				- 계약단으로 발주의뢰		1~2개월
7		기본설계				- 착수보고(착수 후 45일 이내) ․기본계획안, 상위계획, 지자체 의견 검토 등 - 중간보고 ․기본설계도서 작성 등 - 지자체 협의		약 5개월
8		설계VE (총공사비 100억 이상 공사)				- 설계VE ․VE시행 및 결과통보(30일 이내) ․VE 조치결과보고(30일 이내)		약 1개월
9		자재선정 위원회				* 개략공사비 10억, 자재 품목당 4천만원, 공법 2억원 이상 - 자료준비 - 심의개최및결과보고		약 2개월
10		실시설계				- 심의 결과 조치 - 실시설계도서 작성 - 내역서(견적) 작성 - 종합보고		약 5개월
11		조경공사 발주시행		계약 심사		- 기술심사처 협의 ․추정금액 10억이상 일반공사(조경공사) ․추정금액 100억미만 조경공사 ․통합 자문심사 개최(50억～100억) : VE,기술심의,계약심사 주요 검토사항 통합심사		약 3개월
				기술 심의		- 기술심의 ․총공사비 100억이상의 공사 ․심의 개최 및 결과통보 ․심의결과 조치계획 제출
				사업 협의		* 당해 연도 발주계획 미반영시 - 사업주관부서, 사업계획실 협의 ․추정금액 20억이상 일반공사(조경공사) 10억이상 전문공사
12		일상감사				- 발주할 공사 일상감사 ․추정금액 10억이상 종합공사 ․추정금액 5억이상 전문공사		약 2개월
13		발주의뢰				- 본사발주분(수도권 : 추정가격 100억 이상, 그 외 : 83억 이상 공사) ․계약단에 발주의뢰 - 지역본부발주분(수도권 : 추정가격 100억 미만, 그 외 : 83억 미만 공사) ․지역본부에 설계도서 송부		7일 이내
14		공사계약				- 100억~300억 간이형종심제 - 적격심사대상공사 ․일반발주 : 78일 ․긴급발주 : 56일 - 100억 미만공사(지역본부발주분) ․일반발주 : 45일 ․긴급발주 : 37일		1~2개월
15		공사착공 및 용역준공				- 착공간담회(실무회의) : 실착공후 30일 이내(설계설명회) - 용역준공		1~2개월

◇ 단지분야 설계공모 심사업무

<설계담당부서>			<심사주관부서>
설계공모 홈페이지 공고
응모확약서접수			지구별 심사계획 작성
질의접수 및 회신
작품 및 도서 접수
사전검토
법령․지침위반사항 작성 감점표 작성
			심사위원 선정
			① 업체 기피위원 확인 ② 연락우선순위결정(심사부서) ③ 심사위원 연락 ④ 업체 심사위원 확인 ⑤ 심사위원 확정 및 공개
감점사항 참여업체 설명 및 심사주관부서 통보
심사자료 송부(→심사주관부서)			심사위원회 개최
			① 설계설명서 등 작품 사전검토 ② 사업개요 및 공모개요 설명(설계담당부서) ③ 작품설명 및 질의답변(참여업체) ④ 심사 ⑤ 채점 및 평가사유서 작성 ⑥ 심사결과 확정
계약의뢰 및 보상금 지급			심사결과 공개 및 통보