공사감독자 배치기준(안) 공개

「건설기술 진흥법」제39조의2 및 국토교통부 고시 제2020-306호「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」제8조 제3항 제1호에 따라 우리공사 「공사감독자 배치 기준(안)」을 붙임과 같이 공개하오니, 이에 대하여 의견이 있는 경우 2020. 12. 10.(목)까지 아래와 같이 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

□ 제출 의견

○ 공사감독자 배치기준(안)에 대한 의견(사유 포함)

○ 제출자 성명(단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호

○ 기타 참고사항

□ 의견 제출 방법

○ 직접 또는 우편 제출 : 경남 진주시 충의로 19,

한국토지주택공사 건설관리처

○ 전자메일 :  lycos8144@lh.or.kr

※ 이 공고와 관련한 자세한 사항은 한국토지주택공사 건설관리처 (전화 055-922-4745, 과장 남기홍)로 문의하여 주시기 바랍니다.

2020년 12월 4일

한국토지주택공사 사장

공사감독자 배치 기준

1. 토목선형(도로, 철도, 하천)분야

업무분류체계				적용 수량 단위	기준인원수(인･일)	보정계수			난이도
단계	기본업무				고급	a	b	c
공통 업무	과업착수준비			식	7.0
	건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영			식	20.5
	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영			식	27.3
	작업분류체계 및 사업번호체계 관리/사업정보축적ㆍ관리			식	22.3
	사업정보관리시스템의운영			운영 일수	0.3	○			○
	클레임 사전분석			식	31.0
	최종 건설사업관리 보고	1)시공전 단계		식	27.3
		2)시공이후 단계
					54.6
설계 전 단계	건설기술용역업체 선정			식	43.7
	사업타당성조사보고서의 적정성 검토			식	21.6			○	○
	기본계획보고서의 적정성 검토			식	21.3			○	○
	발주방식 결정 지원			식	31.0
	관리기준공정계획수립			식	18.0				○
	총사업비 집행계획수립지원			식	11.4
기본 설계 단계	기본설계 설계자 선정업무 지원			식	17.1
	기본설계 조정 및 연계성 검토			용역 개월	3.2	○	○	○	○
	기본설계단계의 예산검증 및 조정업무			식	22.5	○	○	○	○
	기본설계의 경제성(VE) 검토			식	90.6				○
	기본설계용역성과검토			용역 개월	5.7	○	○	○	○
	기본설계 용역 기성 및 준공검사관리			회	3.7
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원			식	6.8		○	○
	기본설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원			회	2.5
실시 설계 단계	실시설계 설계자 선정업무 지원			식	13.9
	실시설계 조정 및 연계성 검토			용역 개월	5.9	○	○	○	○
	실시설계단계의 예산검증 및 조정업무			식	23.3	○	○	○	○
	실시설계의 경제성(VE) 검토			식	123.3				○
	실시설계용역성과검토			용역 개월	10.5	○	○	○	○
	실시설계 용역 기성 및 준공검사관리			회	8.1
	지급자재 조달 및 관리계획 수립			식	10.2
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원			식	8.3		○	○
	실시설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원			회	6.4
	시공자 선정계획수립			식	16.9
구매 조달 단계	입찰업무지원			식	37.7
	계약업무지원			식	27.5
	지급자재조달지원			공사 개월	0.6
시공 단계	공사착수			식	107.7
	시공성과확인 및 검측업무			공사 일수	2.2	○	○		○
	사용자재의 적정성 검토			공사 개월	1.8				○
	품질시험 및 성과검토			공사 개월	11.0		○		○
	시공계획검토			공사 개월	6.4	○	○		○
	기술검토 및 교육			공사 개월	5.0		○		○
	공정관리			공사 개월	8.2				○
	안전관리			공사 개월	22.0		○	○	○
	환경관리			공사 개월	2.6				○
	설계변경 관리			공사 개월	13.4				○
	기성검사			회	5.2
	준공검사			식	6.0
	계약자간 시공인터페이스 조정			공사 개월	1.5
	하도급적정성검토			공사 년수	6.9				○
	시공단계의 예산검증 및 지원			회	4.6
	일반행정업무			용역 일수	0.8				○
시공후 단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인		1)도로, 하천	식	23.3
			2)철도		46.6	○	○
	시설물 유지관리지침서 검토			식	25.9
	시설물유지관리 업체 선정			식	20.8
	시설물 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원			식	27.4

가. 투입인원수 산정기준

※ 시공단계 안전관리 보정계수 및 난이도는 1.0 이상만 적용

※ 적용 대상 업무는 건설공사의 특성에 따라 업무를 추가하거나, 제외하고 산정할 수 있음

나. 보정계수

분야	항목	보정계수 값
도로	a. 도로등급	①일반국도 : 1.0 ②고속국도 : 1.1 ③지방도이하 : 0.8 (설계속도에 따라 타등급의 계수 준용가능)
	b. 공사성격	①신설 : 1.0 ②확장 : 1.1
	c. 지역특성	①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.1
철도노반	a. 철도유형	①고속철도, 도시철도(지하), 경전철(지하) : 1.3 ②일반철도(복선), 도시철도(지상), 경전철(지상) : 1.0 ③일반철도(단선) : 0.8
	b. 공사성격	①신설 : 1.0 ②개량 : 1.2
	c. 지역특성	①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.3
철도궤도	a. 철도유형	①고속철도, 도시철도(지하), 경전철(지하) : 1.3 ②일반철도(복선), 도시철도(지상), 경전철(지상) : 1.0 ③일반철도(단선) : 0.8
	b. 공사성격	①신설 : 1.0 ②개량 : 1.2 ③개량(운행선차단) : 1.3
	c. 지역특성	①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.3
하천	a. 하천등급	①국가하천 : 1.0 ②지방하천(소하천포함) : 1.1
	b. 사업유형	①하천개수사업 : 1.0 ②생태하천사업 : 1.1
	c. 지역특성	①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.2

※ 여러 유형, 성격, 특성 등이 혼재된 경우 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용

다. 공사난이도

구분			산식
총공사비 50억원이하 (시공단계만 해당)			․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+(건설사업관리기간보정계수+(0.1*구조물비중)+0.2)*(총공사비*0.2) (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비) (철도궤도는 콘크리트궤도비중 적용)
총공사비 2,000억원 이하	시공 단계	도로	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.1*구조물비중)+0.2 (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비)
		철도 (노반)	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.2*구조물비중}+0.2 (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비)
		철도 (궤도)	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.4*콘크리트궤도비중)+0.2 (※ 콘크리트궤도비중 = 콘크리트궤도연장/총궤도연장)
		하천	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.1*구조물비중)+0.2 (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비)
	시공전 단계		․공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비)
총공사비 2,000억원 초과			․공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250}
비고			․공사비는 10억원 단위로 하며, 전기·통신·소방 공사비는 제외 ․건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1 ※건설사업관리기간 보정계수의 평균건설사업관리기간은 별표 2 제1호라목에서 직선보간법으로 도출

2. 토목비선형(항만, 댐, 공항, 단지 등 기타)분야

가. 투입인원수 산정기준

업무분류체계				적용수량 단위	기준인원수(인･일)	보정계수											난이도
단계	기본업무					항만			공항			댐			단지
					고급	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
공통 업무	과업착수준비			식	7.0
	건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영			식	20.5
	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영			식	27.3
	작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리			식	22.3
	사업정보관리시스템의 운영			운영일수	0.3	○			○					○			○
	클레임 사전분석			식	31.0
	최종 건설사업관리 보고	1)시공전 단계		식	27.3
		2)시공이후 단계			54.6
설계전 단계	건설기술용역업체 선정			식	43.7
	사업타당성조사보고서의 적정성 검토			식	21.6	○			○		○	○		○	○		○
	기본계획보고서의 적정성 검토			식	21.3	○			○		○	○		○	○		○
	발주방식 결정 지원			식	31.0
	관리기준공정계획수립			식	18.0												○
	총사업비 집행계획수립지원(종합예산게획서)			식	11.4
기본 설계 단계	기본설계 설계자 선정업무 지원			식	17.1
	기본설계 조정 및 연계성 검토			용역 개월	3.2	○			○		○	○		○	○	○	○
	기본설계단계의 예산검증 및 조정업무			식	22.5	○			○		○	○		○	○	○	○
	기본설계의 경제성(VE) 검토			식	90.6												○
	기본설계용역성과검토			용역 개월	5.7	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	기본설계 용역 기성 및 준공검사관리			회	3.7	○			○		○	○		○
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원			식	6.8						○			○	○	○
	기본설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원			회	2.5
실시 설계 단계	실시설계 설계자 선정업무 지원			식	13.9
	실시설계 조정 및 연계성 검토			용역 개월	5.9	○			○		○	○		○	○	○	○
	실시설계단계의 예산검증 및 조정업무			식	23.3	○			○		○	○		○	○	○	○
	실시설계의 경제성(VE) 검토			식	123.3												○
	실시설계용역성과검토			용역 개월	10.5	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	실시설계 용역 기성 및 준공검사관리			회	8.1	○			○		○	○		○
	지급자재 조달 및 관리계획 수립			식	10.2
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원			식	8.3						○			○	○	○
	실시설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원			회	6.4
	시공자 선정계획수립			식	16.9
구매 조달 단계	입찰업무지원			식	37.7
	계약업무지원			식	27.5
	지급자재조달지원			공사 개월	0.6
시공 단계	공사착수			식	110.1		○			○	○		○
	시공성과확인 및 검측업무			공사 일수	2.2	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○
	사용자재의 적정성 검토			공사 개월	1.8												○
	품질시험 및 성과검토			공사 개월	11.0	○	○	○	○	○		○	○			○	○
	시공계획검토			공사 개월	6.0	○					○	○		○		○	○
	기술검토 및 교육			공사 개월	5.0	○					○	○		○		○	○
	공정관리			공사 개월	5.5							○	○	○			○
	안전관리			공사 개월	22.0	○	○			○	○	○	○		○	○	○
	환경관리			공사 개월	3.5												○
	설계변경 관리			공사 개월	13.4												○
	기성검사			회	5.2
	준공검사			식	6.1
	계약자간 시공인터페이스 조정			공사 개월	1.5
	하도급적정성검토			공사 년수	6.3												○
	시공단계의 예산검증 및 지원			회	4.6
	일반행정업무			용역 일수	0.9												○
시공후 단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인		항만, 공항, 단지 등 기타	식	22.1	○			○
			댐		36.1								○	○
	시설물 유지관리지침서 검토			식	29.0
	시설물유지관리 업체 선정			식	20.8
	시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원			식	25.3

※ 시공단계 안전관리 보정계수 및 난이도는 1.0 이상만 적용

※ 적용 대상 업무는 건설공사의 특성에 따라 업무를 추가하거나, 제외하고 산정할 수 있음

나. 보정계수

분야	항목	보정계수 값
항만	a.항만유형 및선박규모	①준설및매립 : 0.7 ②배후부지 : 0.9 ③(계류시설) 일반 및 기타부두, 물양장, (외곽시설) 호안, 방파제, 가호안, 기타외곽시설 : 1.0 ④(계류시설, 전문부두) 컨테이너, 자동차, 여객 : 1.0 ⑤(계류시설) 말뚝식, 원유부이 : 1.2 ⑥(계류시설) 부잔교, 마리나, (외곽시설) 갑문, 수문 : 1.2
	b.지역	①동해 : 1.2 ②서해 : 1.2 ③남해 : 1.0 ④기타 도서지역(제주도 제외) : 1.4
	c.수심	①5m이하 : 0.8 ②5m초과～20m이하 : 1.0 ③20m초과 : 1.2
공항	d.공항규모	①국내선 : 1.0 ②국제선(airside) : 1.1
	e.지역특성	①육상공항 : 1.0 ②해상공항 : 1.2
	f.공사성격	①신설 : 1.0 ②확장(개량포함) : 1.1
댐	g.댐형식	①필댐 : 0.9 ②CFRD : 1.0 ③콘크리트댐(복합댐) : 1.2 ④아치댐 : 1.4
	h.여수로형식	①무문식 : 0.9 ② 문비식 : 1.0
	i.발전시설용량	①없음 : 0.8 ②3,000kW이하 : 0.9 ③3,000kW～10,000kW이하 : 1.0 ④10,000kW초과 : 1.2
단지 등 기타	j.지역특성	①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.1
	k.공사성격	①신설 : 1.0 ②확장 : 1.1

※ 여러 유형, 성격, 특성 등이 혼재된 경우 해당 공사비를 기준으로 가중평균한 값 적용

다. 공사난이도

구분			산식
총공사비 50억원이하 (시공단계만 해당)			․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+(건설사업관리기간보정계수+(0.1*구조물비중)+0.2)*(총공사비*0.2) (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비, 댐, 공항은 각각의 해당 비중 적용)
총공사비 2,000억원 이하	시공 단계	항만, 단지 등 기타	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.1*구조물비중)+0.2 (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비)
		댐	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.2*부속구조물공사비중)+0.2 (※ 부속구조물공사비중 = 부속구조물공사비/총공사비)
		공항	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.2*콘크리트포장공사비비중)+0.2 (※ 콘크리트포장공사비중 = 콘크리트포장공사비/총포장공사비)
	시공전 단계		․공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비)
총공사비 2,000억원 초과			․공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250}
비고			․공사비는 10억원 단위로 하며, 전기·통신·소방 공사비는 제외 ․건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1 ※건설사업관리기간 보정계수의 평균건설사업관리기간은 별표 2 제1호라목에서 직선보간법으로 도출

3.. 건축분야

가. 투입인원수 산정기준

업무분류체계			적용 수량 단위	기준인원수(인･일)	보정계수			난이도
단계	기본업무			고급	a	b	c
공통 업무	과업착수준비		식	7.0
	건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영		식	20.5
	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영		식	27.3
	작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리		식	22.3				○
	사업정보관리시스템의 운영		운영 일수	0.3				○
	클레임 사전분석		식	31.0		○
	최종 건설사업관리 보고	1)시공전 단계	식	27.3
		2)시공 이후 단계		54.6
설계전 단계	건설기술용역업체 선정		식	43.7
	사업타당성조사보고서의 적정성 검토		식	21.6				○
	기본계획보고서의 적정성 검토		식	21.3				○
	발주방식 결정 지원		식	31.0
	관리기준공정계획수립		식	18.0	○	○		○
	총사업비 집행계획수립지원(종합예산게획서)		식	11.4
기본 설계 단계	기본설계 설계자 선정업무 지원		식	17.1
	기본설계 조정 및 연계성 검토		용역 개월	8.4	○	○	○	○
	기본설계단계의 예산검증 및 조정업무		식	22.5				○
	기본설계의 경제성(VE) 검토		식	90.6				○
	기본설계용역성과검토		용역 개월	8.8	○	○	○	○
	기본설계 용역 기성 및 준공검사관리		회	3.7
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원		식	6.8
	기본설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원		회	2.5
실시 설계 단계	실시설계 설계자 선정업무 지원		식	13.9
	실시설계 조정 및 연계성 검토		용역 개월	18.4	○	○	○	○
	실시설계단계의 예산검증 및 조정업무		식	23.3				○
	실시설계의 경제성(VE) 검토		식	123.3				○
	실시설계용역성과검토		용역 개월	18.9	○	○	○	○
	실시설계 용역 기성 및 준공검사관리		회	8.1
	지급자재 조달 및 관리계획 수립		식	10.2
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원		식	8.3
	실시설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원		회	6.4
	시공자 선정계획수립		식	16.9
구매 조달 단계	입찰업무지원		식	37.7
	계약업무지원		식	27.5
	지급자재조달지원		공사 개월	0.6	○		○
시공 단계	공사착수		식	72.7
	시공성과확인 및 검측업무		공사 일수	2.9	○	○	○	○
	사용자재의 적정성 검토		공사 개월	10.0	○	○		○
	품질시험 및 성과검토		공사 개월	12.6	○			○
	시공계획검토		공사 개월	8.8	○	○	○	○
	기술검토 및 교육		공사 개월	10.1	○			○
	공정관리		공사 개월	9.0	○	○		○
	안전관리		공사 개월	22.0		○		○
	환경관리		공사 개월	5.3		○		○
	설계변경 관리		공사 개월	7.5			○	○
	기성검사		회	6.6
	준공검사		식	3.8
	계약자간 시공인터페이스 조정		공사 개월	2.8	○
	하도급적정성검토		공사 년수	23.0				○
	시공단계의 예산검증 및 지원		회	36.4				○
	일반행정업무		용역 일수	1.6				○
시공후 단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인		식	13.6	○
	시설물 유지관리지침서 검토		식	32.6
	시설물유지관리 업체 선정		식	20.8
	시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원		식	27.2

※ 시공단계 안전관리 보정계수 및 난이도는 1.0 이상만 적용

※ 적용 대상 업무는 건설공사의 특성에 따라 업무를 추가하거나, 제외하고 산정할 수 있음

나. 보정계수

분야	항목	보정계수 값
건축	a.건축용도	①단순공종 : 0.9 ②보통공종 : 1.0 ③복잡공종 : 1.1 (별표 1 제1호사목2)에 따라 공종 구분)
	b.공사성격	①신축 : 1.0 ②전면 리모델링(증축포함) : 1.1 ③순환 리모델링 : 1.2
	c.BIM적용여부	①미적용 : 1.0 ②적용 : 1.1

※ 여러 용도, 성격 등이 혼재된 경우 해당 공사비를 기준으로 가중평균한 값 적용

다. 공사난이도

구분		산식
총공사비 50억원이하 (시공단계만 해당)		․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+(건설사업관리기간보정계수+(0.5*골조공사비 비중)+0.2)*(총공사비*0.2) (※ 골조공사비 비중 = 골조공사비/총공사비)
총공사비 2,000억원 이하	시공 단계	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.5*골조공사비 비중)+0.2 (※ 골조공사비중 = 골조공사비/총공사비)
	시공전 단계	․공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.001*총공사비)
총공사비 2,000억원 초과		․공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250}
비고		․공사비는 10억원 단위로 하며, 전기·통신·소방 공사비는 제외 ․건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1 ※건설사업관리기간 보정계수의 평균건설사업관리기간은 별표 2 제1호라목에서 직선보간법으로 도출

4. 플랜트Ⅰ(상하수도, 폐기물)분야

가. 투입인원수 산정기준

업무분류체계			적용 수량 단위	기준인원수(인･일)	보정계수			난이도
단계	기본업무			고급	a	b	c
공통 업무	과업착수준비		식	24.2
	건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영		식	31.5
	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영		식	140.9
	작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리		식	30.6				○
	사업정보관리시스템의 운영		운영일수	0.3	○			○
	클레임 사전분석		식	62.5
	최종 건설사업관리 보고	1)시공전 단계	식	27.3
		2)시공 이후 단계		54.6
설계전 단계	건설기술용역업체 선정		식	43.8
	사업타당성조사보고서의 적정성 검토		식	21.7			○	○
	기본계획보고서의 적정성 검토		식	21.4			○	○
	발주방식 결정 지원		식	31.1
	관리기준공정계획수립		식	18.1				○
	총사업비 집행계획수립지원(종합예산계획서)		식	11.7
기본 설계 단계	기본설계 설계자 선정업무 지원		식	17.1
	기본설계 조정 및 연계성 검토		용역 개월	3.2	○	○	○	○
	기본설계단계의 예산검증 및 조정업무		식	22.5	○	○	○	○
	기본설계의 경제성(VE) 검토		식	90.6				○
	기본설계용역성과검토		용역 개월	5.7	○	○	○	○
	기본설계 용역 기성 및 준공검사관리		회	3.7
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원		식	6.8		○	○
	기본설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원		회	2.5
실시 설계 단계	실시설계 설계자 선정업무 지원		식	13.9
	실시설계 조정 및 연계성 검토		용역 개월	5.9	○	○	○	○
	실시설계단계의 예산검증 및 조정업무		식	23.3	○	○	○	○
	실시설계의 경제성(VE) 검토		식	123.3				○
	실시설계용역성과검토		용역 개월	10.5	○	○	○	○
	실시설계 용역 기성 및 준공검사관리		회	8.1
	지급자재 조달 및 관리계획 수립		식	10.2
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원		식	8.3		○	○
	실시설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원		회	6.4
	시공자 선정계획수립		식	16.9
구매 조달 단계	입찰업무지원		식	63.3
	계약업무지원		식	48.5
	지급자재조달지원		공사 개월	1.5
시공 단계	공사착수		식	122.5
	시공성과확인 및 검측업무		공사 일수	2.1	○	○		○
	사용자재의 적정성 검토		공사 개월	6.2				○
	품질시험 및 성과검토		공사 개월	12.0		○		○
	시공계획검토		공사 개월	6.9	○	○	○	○
	기술검토 및 교육		공사 개월	11.7		○		○
	공정관리		공사 개월	12.8			○	○
	안전관리		공사 개월	22.0			○	○
	환경관리		공사 개월	3.3			○	○
	설계변경 관리		공사 개월	14.0				○
	기성검사		회	5.4
	준공검사		식	6.1
	계약자간 시공인터페이스 조정		공사 개월	1.5
	하도급적정성검토		공사 년수	6.9				○
	시공단계의 예산검증 및 지원		회	5.1
	일반행정업무		용역 일수	1.2				○
시공 후 단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인		개월	52.0				○
	시설물 유지관리지침서 검토		식	40.6
	시설물유지관리 업체 선정		식	20.8
	시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원		식	28.0

※ 시공단계 안전관리 보정계수 및 난이도는 1.0 이상만 적용

※ 적용 대상 업무는 건설공사의 특성에 따라 업무를 추가하거나, 제외하고 산정할 수 있음

나. 보정계수

분야	항목	보정계수 값
플랜트Ⅰ	a.공사유형	①관로공사, 매립장공사 : 0.8 ②구조물공사(배수지, 저류조, 터널 등) : 0.9 ③플랜트공사(정수, 하수, 폐수처리, 분뇨처리, 폐기물처리, 쓰레기 수송관로 등 ④에 해당하지 아니하는 시설) : 1.0 ④플랜트공사(폐기물처리(소각, 폐기물연료화, 음식물, 재활용, 슬러지처리) 시설로 처리량이 50톤/일을 초과하는 시설) : 1.2
	b.공사성격	①신설 : 1.0 ②확장 : 1.1 ③개량 : 1.2
	c.지역특성	①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.3

※ 여러 유형, 성격, 특성 등이 혼재된 경우 해당 공사비를 기준으로 가중평균한 값 적용

다. 공사난이도

구분		산식
총공사비 50억원이하 (시공단계만 해당)		․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+(건설사업관리기간보정계수 +(0.1*기계설비공사 비중)+0.2)*(총공사비*0.2) (※ 기계설비공사비중 = 기계설비공사비/총공사비)
총공사비 2,000억원 이하	시공 이후 단계	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.1*기계설비공사비중)+0.2 (※ 기계설비공사비중 = 기계설비공사비/총공사비)
	시공전 단계	․공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비)
총공사비 2,000억원 초과		․공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250}
비고		․공사비는 10억원 단위로 하며, 전기·통신·소방 공사비는 제외 ․건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1 ※건설사업관리기간 보정계수의 평균건설사업관리기간은 별표 2 제1호라목에서 직선보간법으로 도출