「공사감독자 배치 기준」

「건설기술 진흥법」제39조의2 및 국토교통부 고시 제2020-306호「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」제8조 제3항 제3호에 따라 우리공사 「공사감독자 배치 기준」을 붙임과 같이 공고합니다.

2020년 1월 1일

한국토지주택공사 사장

공사감독자 배치 기준

1. 토목선형(도로, 철도, 하천)분야

업무분류체계				적용 수량 단위	기준인원수(인･일)	보정계수			난이도
단계	기본업무				고급	a	b	c
공통 업무	과업착수준비			식	7.0
	건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영			식	20.5
	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영			식	27.3
	작업분류체계 및 사업번호체계 관리/사업정보축적ㆍ관리			식	22.3
	사업정보관리시스템의운영			운영 일수	0.3	○			○
	클레임 사전분석			식	31.0
	최종 건설사업관리 보고	1)시공전 단계		식	27.3
		2)시공이후 단계
					54.6
설계 전 단계	건설기술용역업체 선정			식	43.7
	사업타당성조사보고서의 적정성 검토			식	21.6			○	○
	기본계획보고서의 적정성 검토			식	21.3			○	○
	발주방식 결정 지원			식	31.0
	관리기준공정계획수립			식	18.0				○
	총사업비 집행계획수립지원			식	11.4
기본 설계 단계	기본설계 설계자 선정업무 지원			식	17.1
	기본설계 조정 및 연계성 검토			용역 개월	3.2	○	○	○	○
	기본설계단계의 예산검증 및 조정업무			식	22.5	○	○	○	○
	기본설계의 경제성(VE) 검토			식	90.6				○
	기본설계용역성과검토			용역 개월	5.7	○	○	○	○
	기본설계 용역 기성 및 준공검사관리			회	3.7
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원			식	6.8		○	○
	기본설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원			회	2.5
실시 설계 단계	실시설계 설계자 선정업무 지원			식	13.9
	실시설계 조정 및 연계성 검토			용역 개월	5.9	○	○	○	○
	실시설계단계의 예산검증 및 조정업무			식	23.3	○	○	○	○
	실시설계의 경제성(VE) 검토			식	123.3				○
	실시설계용역성과검토			용역 개월	10.5	○	○	○	○
	실시설계 용역 기성 및 준공검사관리			회	8.1
	지급자재 조달 및 관리계획 수립			식	10.2
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원			식	8.3		○	○
	실시설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원			회	6.4
	시공자 선정계획수립			식	16.9
구매 조달 단계	입찰업무지원			식	37.7
	계약업무지원			식	27.5
	지급자재조달지원			공사 개월	0.6
시공 단계	공사착수			식	107.7
	시공성과확인 및 검측업무			공사 일수	2.2	○	○		○
	사용자재의 적정성 검토			공사 개월	1.8				○
	품질시험 및 성과검토			공사 개월	11.0		○		○
	시공계획검토			공사 개월	6.4	○	○		○
	기술검토 및 교육			공사 개월	5.0		○		○
	공정관리			공사 개월	8.2				○
	안전관리			공사 개월	22.0		○	○	○
	환경관리			공사 개월	2.6				○
	설계변경 관리			공사 개월	13.4				○
	기성검사			회	5.2
	준공검사			식	6.0
	계약자간 시공인터페이스 조정			공사 개월	1.5
	하도급적정성검토			공사 년수	6.9				○
	시공단계의 예산검증 및 지원			회	4.6
	일반행정업무			용역 일수	0.8				○
시공후 단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인		1)도로, 하천	식	23.3
			2)철도		46.6	○	○
	시설물 유지관리지침서 검토			식	25.9
	시설물유지관리 업체 선정			식	20.8
	시설물 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원			식	27.4

가. 투입인원수 산정기준

※ 시공단계 안전관리 보정계수 및 난이도는 1.0 이상만 적용

※ 적용 대상 업무는 건설공사의 특성에 따라 업무를 추가하거나, 제외하고 산정할 수 있음

나. 보정계수

분야	항목	보정계수 값
도로	a. 도로등급	①일반국도 : 1.0 ②고속국도 : 1.1 ③지방도이하 : 0.8 (설계속도에 따라 타등급의 계수 준용가능)
	b. 공사성격	①신설 : 1.0 ②확장 : 1.1
	c. 지역특성	①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.1
철도노반	a. 철도유형	①고속철도, 도시철도(지하), 경전철(지하) : 1.3 ②일반철도(복선), 도시철도(지상), 경전철(지상) : 1.0 ③일반철도(단선) : 0.8
	b. 공사성격	①신설 : 1.0 ②개량 : 1.2
	c. 지역특성	①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.3
철도궤도	a. 철도유형	①고속철도, 도시철도(지하), 경전철(지하) : 1.3 ②일반철도(복선), 도시철도(지상), 경전철(지상) : 1.0 ③일반철도(단선) : 0.8
	b. 공사성격	①신설 : 1.0 ②개량 : 1.2 ③개량(운행선차단) : 1.3
	c. 지역특성	①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.3
하천	a. 하천등급	①국가하천 : 1.0 ②지방하천(소하천포함) : 1.1
	b. 사업유형	①하천개수사업 : 1.0 ②생태하천사업 : 1.1
	c. 지역특성	①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.2

※ 여러 유형, 성격, 특성 등이 혼재된 경우 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용

다. 공사난이도

구분			산식
총공사비 50억원이하 (시공단계만 해당)			․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+(건설사업관리기간보정계수+(0.1*구조물비중)+0.2)*(총공사비*0.2) (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비) (철도궤도는 콘크리트궤도비중 적용)
총공사비 2,000억원 이하	시공 단계	도로	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.1*구조물비중)+0.2 (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비)
		철도 (노반)	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.2*구조물비중}+0.2 (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비)
		철도 (궤도)	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.4*콘크리트궤도비중)+0.2 (※ 콘크리트궤도비중 = 콘크리트궤도연장/총궤도연장)
		하천	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.1*구조물비중)+0.2 (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비)
	시공전 단계		․공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비)
총공사비 2,000억원 초과			․공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250}
비고			․공사비는 10억원 단위로 하며, 전기·통신·소방 공사비는 제외 ․건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1 ※건설사업관리기간 보정계수의 평균건설사업관리기간은 별표 2 제1호라목에서 직선보간법으로 도출

2. 토목비선형(항만, 댐, 공항, 단지 등 기타)분야

가. 투입인원수 산정기준

업무분류체계				적용수량 단위	기준인원수(인･일)	보정계수											난이도
단계	기본업무					항만			공항			댐			단지
					고급	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
공통 업무	과업착수준비			식	7.0
	건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영			식	20.5
	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영			식	27.3
	작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리			식	22.3
	사업정보관리시스템의 운영			운영일수	0.3	○			○					○			○
	클레임 사전분석			식	31.0
	최종 건설사업관리 보고	1)시공전 단계		식	27.3
		2)시공이후 단계			54.6
설계전 단계	건설기술용역업체 선정			식	43.7
	사업타당성조사보고서의 적정성 검토			식	21.6	○			○		○	○		○	○		○
	기본계획보고서의 적정성 검토			식	21.3	○			○		○	○		○	○		○
	발주방식 결정 지원			식	31.0
	관리기준공정계획수립			식	18.0												○
	총사업비 집행계획수립지원(종합예산게획서)			식	11.4
기본 설계 단계	기본설계 설계자 선정업무 지원			식	17.1
	기본설계 조정 및 연계성 검토			용역 개월	3.2	○			○		○	○		○	○	○	○
	기본설계단계의 예산검증 및 조정업무			식	22.5	○			○		○	○		○	○	○	○
	기본설계의 경제성(VE) 검토			식	90.6												○
	기본설계용역성과검토			용역 개월	5.7	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	기본설계 용역 기성 및 준공검사관리			회	3.7	○			○		○	○		○
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원			식	6.8						○			○	○	○
	기본설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원			회	2.5
실시 설계 단계	실시설계 설계자 선정업무 지원			식	13.9
	실시설계 조정 및 연계성 검토			용역 개월	5.9	○			○		○	○		○	○	○	○
	실시설계단계의 예산검증 및 조정업무			식	23.3	○			○		○	○		○	○	○	○
	실시설계의 경제성(VE) 검토			식	123.3												○
	실시설계용역성과검토			용역 개월	10.5	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	실시설계 용역 기성 및 준공검사관리			회	8.1	○			○		○	○		○
	지급자재 조달 및 관리계획 수립			식	10.2
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원			식	8.3						○			○	○	○
	실시설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원			회	6.4
	시공자 선정계획수립			식	16.9
구매 조달 단계	입찰업무지원			식	37.7
	계약업무지원			식	27.5
	지급자재조달지원			공사 개월	0.6
시공 단계	공사착수			식	110.1		○			○	○		○
	시공성과확인 및 검측업무			공사 일수	2.2	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○
	사용자재의 적정성 검토			공사 개월	1.8												○
	품질시험 및 성과검토			공사 개월	11.0	○	○	○	○	○		○	○			○	○
	시공계획검토			공사 개월	6.0	○					○	○		○		○	○
	기술검토 및 교육			공사 개월	5.0	○					○	○		○		○	○
	공정관리			공사 개월	5.5							○	○	○			○
	안전관리			공사 개월	22.0	○	○			○	○	○	○		○	○	○
	환경관리			공사 개월	3.5												○
	설계변경 관리			공사 개월	13.4												○
	기성검사			회	5.2
	준공검사			식	6.1
	계약자간 시공인터페이스 조정			공사 개월	1.5
	하도급적정성검토			공사 년수	6.3												○
	시공단계의 예산검증 및 지원			회	4.6
	일반행정업무			용역 일수	0.9												○
시공후 단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인		항만, 공항, 단지 등 기타	식	22.1	○			○
			댐		36.1								○	○
	시설물 유지관리지침서 검토			식	29.0
	시설물유지관리 업체 선정			식	20.8
	시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원			식	25.3

※ 시공단계 안전관리 보정계수 및 난이도는 1.0 이상만 적용

※ 적용 대상 업무는 건설공사의 특성에 따라 업무를 추가하거나, 제외하고 산정할 수 있음

나. 보정계수

분야	항목	보정계수 값
항만	a.항만유형 및선박규모	①준설및매립 : 0.7 ②배후부지 : 0.9 ③(계류시설) 일반 및 기타부두, 물양장, (외곽시설) 호안, 방파제, 가호안, 기타외곽시설 : 1.0 ④(계류시설, 전문부두) 컨테이너, 자동차, 여객 : 1.0 ⑤(계류시설) 말뚝식, 원유부이 : 1.2 ⑥(계류시설) 부잔교, 마리나, (외곽시설) 갑문, 수문 : 1.2
	b.지역	①동해 : 1.2 ②서해 : 1.2 ③남해 : 1.0 ④기타 도서지역(제주도 제외) : 1.4
	c.수심	①5m이하 : 0.8 ②5m초과～20m이하 : 1.0 ③20m초과 : 1.2
공항	d.공항규모	①국내선 : 1.0 ②국제선(airside) : 1.1
	e.지역특성	①육상공항 : 1.0 ②해상공항 : 1.2
	f.공사성격	①신설 : 1.0 ②확장(개량포함) : 1.1
댐	g.댐형식	①필댐 : 0.9 ②CFRD : 1.0 ③콘크리트댐(복합댐) : 1.2 ④아치댐 : 1.4
	h.여수로형식	①무문식 : 0.9 ② 문비식 : 1.0
	i.발전시설용량	①없음 : 0.8 ②3,000kW이하 : 0.9 ③3,000kW～10,000kW이하 : 1.0 ④10,000kW초과 : 1.2
단지 등 기타	j.지역특성	①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.1
	k.공사성격	①신설 : 1.0 ②확장 : 1.1

※ 여러 유형, 성격, 특성 등이 혼재된 경우 해당 공사비를 기준으로 가중평균한 값 적용

다. 공사난이도

구분			산식
총공사비 50억원이하 (시공단계만 해당)			․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+(건설사업관리기간보정계수+(0.1*구조물비중)+0.2)*(총공사비*0.2) (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비, 댐, 공항은 각각의 해당 비중 적용)
총공사비 2,000억원 이하	시공 단계	항만, 단지 등 기타	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.1*구조물비중)+0.2 (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비)
		댐	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.2*부속구조물공사비중)+0.2 (※ 부속구조물공사비중 = 부속구조물공사비/총공사비)
		공항	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.2*콘크리트포장공사비비중)+0.2 (※ 콘크리트포장공사비중 = 콘크리트포장공사비/총포장공사비)
	시공전 단계		․공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비)
총공사비 2,000억원 초과			․공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250}
비고			․공사비는 10억원 단위로 하며, 전기·통신·소방 공사비는 제외 ․건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1 ※건설사업관리기간 보정계수의 평균건설사업관리기간은 별표 2 제1호라목에서 직선보간법으로 도출

3.. 건축분야

가. 투입인원수 산정기준

업무분류체계			적용 수량 단위	기준인원수(인･일)	보정계수			난이도
단계	기본업무			고급	a	b	c
공통 업무	과업착수준비		식	7.0
	건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영		식	20.5
	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영		식	27.3
	작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리		식	22.3				○
	사업정보관리시스템의 운영		운영 일수	0.3				○
	클레임 사전분석		식	31.0		○
	최종 건설사업관리 보고	1)시공전 단계	식	27.3
		2)시공 이후 단계		54.6
설계전 단계	건설기술용역업체 선정		식	43.7
	사업타당성조사보고서의 적정성 검토		식	21.6				○
	기본계획보고서의 적정성 검토		식	21.3				○
	발주방식 결정 지원		식	31.0
	관리기준공정계획수립		식	18.0	○	○		○
	총사업비 집행계획수립지원(종합예산게획서)		식	11.4
기본 설계 단계	기본설계 설계자 선정업무 지원		식	17.1
	기본설계 조정 및 연계성 검토		용역 개월	8.4	○	○	○	○
	기본설계단계의 예산검증 및 조정업무		식	22.5				○
	기본설계의 경제성(VE) 검토		식	90.6				○
	기본설계용역성과검토		용역 개월	8.8	○	○	○	○
	기본설계 용역 기성 및 준공검사관리		회	3.7
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원		식	6.8
	기본설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원		회	2.5
실시 설계 단계	실시설계 설계자 선정업무 지원		식	13.9
	실시설계 조정 및 연계성 검토		용역 개월	18.4	○	○	○	○
	실시설계단계의 예산검증 및 조정업무		식	23.3				○
	실시설계의 경제성(VE) 검토		식	123.3				○
	실시설계용역성과검토		용역 개월	18.9	○	○	○	○
	실시설계 용역 기성 및 준공검사관리		회	8.1
	지급자재 조달 및 관리계획 수립		식	10.2
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원		식	8.3
	실시설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원		회	6.4
	시공자 선정계획수립		식	16.9
구매 조달 단계	입찰업무지원		식	37.7
	계약업무지원		식	27.5
	지급자재조달지원		공사 개월	0.6	○		○
시공 단계	공사착수		식	72.7
	시공성과확인 및 검측업무		공사 일수	2.9	○	○	○	○
	사용자재의 적정성 검토		공사 개월	10.0	○	○		○
	품질시험 및 성과검토		공사 개월	12.6	○			○
	시공계획검토		공사 개월	8.8	○	○	○	○
	기술검토 및 교육		공사 개월	10.1	○			○
	공정관리		공사 개월	9.0	○	○		○
	안전관리		공사 개월	22.0		○		○
	환경관리		공사 개월	5.3		○		○
	설계변경 관리		공사 개월	7.5			○	○
	기성검사		회	6.6
	준공검사		식	3.8
	계약자간 시공인터페이스 조정		공사 개월	2.8	○
	하도급적정성검토		공사 년수	23.0				○
	시공단계의 예산검증 및 지원		회	36.4				○
	일반행정업무		용역 일수	1.6				○
시공후 단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인		식	13.6	○
	시설물 유지관리지침서 검토		식	32.6
	시설물유지관리 업체 선정		식	20.8
	시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원		식	27.2

※ 시공단계 안전관리 보정계수 및 난이도는 1.0 이상만 적용

※ 적용 대상 업무는 건설공사의 특성에 따라 업무를 추가하거나, 제외하고 산정할 수 있음

나. 보정계수

분야	항목	보정계수 값
건축	a.건축용도	①단순공종 : 0.9 ②보통공종 : 1.0 ③복잡공종 : 1.1 (별표 1 제1호사목2)에 따라 공종 구분)
	b.공사성격	①신축 : 1.0 ②전면 리모델링(증축포함) : 1.1 ③순환 리모델링 : 1.2
	c.BIM적용여부	①미적용 : 1.0 ②적용 : 1.1

※ 여러 용도, 성격 등이 혼재된 경우 해당 공사비를 기준으로 가중평균한 값 적용

다. 공사난이도

구분		산식
총공사비 50억원이하 (시공단계만 해당)		․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+(건설사업관리기간보정계수+(0.5*골조공사비 비중)+0.2)*(총공사비*0.2) (※ 골조공사비 비중 = 골조공사비/총공사비)
총공사비 2,000억원 이하	시공 단계	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.5*골조공사비 비중)+0.2 (※ 골조공사비중 = 골조공사비/총공사비)
	시공전 단계	․공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.001*총공사비)
총공사비 2,000억원 초과		․공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250}
비고		․공사비는 10억원 단위로 하며, 전기·통신·소방 공사비는 제외 ․건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1 ※건설사업관리기간 보정계수의 평균건설사업관리기간은 별표 2 제1호라목에서 직선보간법으로 도출

4. 플랜트Ⅰ(상하수도, 폐기물)분야

가. 투입인원수 산정기준

업무분류체계			적용 수량 단위	기준인원수(인･일)	보정계수			난이도
단계	기본업무			고급	a	b	c
공통 업무	과업착수준비		식	24.2
	건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영		식	31.5
	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영		식	140.9
	작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리		식	30.6				○
	사업정보관리시스템의 운영		운영일수	0.3	○			○
	클레임 사전분석		식	62.5
	최종 건설사업관리 보고	1)시공전 단계	식	27.3
		2)시공 이후 단계		54.6
설계전 단계	건설기술용역업체 선정		식	43.8
	사업타당성조사보고서의 적정성 검토		식	21.7			○	○
	기본계획보고서의 적정성 검토		식	21.4			○	○
	발주방식 결정 지원		식	31.1
	관리기준공정계획수립		식	18.1				○
	총사업비 집행계획수립지원(종합예산계획서)		식	11.7
기본 설계 단계	기본설계 설계자 선정업무 지원		식	17.1
	기본설계 조정 및 연계성 검토		용역 개월	3.2	○	○	○	○
	기본설계단계의 예산검증 및 조정업무		식	22.5	○	○	○	○
	기본설계의 경제성(VE) 검토		식	90.6				○
	기본설계용역성과검토		용역 개월	5.7	○	○	○	○
	기본설계 용역 기성 및 준공검사관리		회	3.7
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원		식	6.8		○	○
	기본설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원		회	2.5
실시 설계 단계	실시설계 설계자 선정업무 지원		식	13.9
	실시설계 조정 및 연계성 검토		용역 개월	5.9	○	○	○	○
	실시설계단계의 예산검증 및 조정업무		식	23.3	○	○	○	○
	실시설계의 경제성(VE) 검토		식	123.3				○
	실시설계용역성과검토		용역 개월	10.5	○	○	○	○
	실시설계 용역 기성 및 준공검사관리		회	8.1
	지급자재 조달 및 관리계획 수립		식	10.2
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원		식	8.3		○	○
	실시설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원		회	6.4
	시공자 선정계획수립		식	16.9
구매 조달 단계	입찰업무지원		식	63.3
	계약업무지원		식	48.5
	지급자재조달지원		공사 개월	1.5
시공 단계	공사착수		식	122.5
	시공성과확인 및 검측업무		공사 일수	2.1	○	○		○
	사용자재의 적정성 검토		공사 개월	6.2				○
	품질시험 및 성과검토		공사 개월	12.0		○		○
	시공계획검토		공사 개월	6.9	○	○	○	○
	기술검토 및 교육		공사 개월	11.7		○		○
	공정관리		공사 개월	12.8			○	○
	안전관리		공사 개월	22.0			○	○
	환경관리		공사 개월	3.3			○	○
	설계변경 관리		공사 개월	14.0				○
	기성검사		회	5.4
	준공검사		식	6.1
	계약자간 시공인터페이스 조정		공사 개월	1.5
	하도급적정성검토		공사 년수	6.9				○
	시공단계의 예산검증 및 지원		회	5.1
	일반행정업무		용역 일수	1.2				○
시공 후 단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인		개월	52.0				○
	시설물 유지관리지침서 검토		식	40.6
	시설물유지관리 업체 선정		식	20.8
	시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원		식	28.0

※ 시공단계 안전관리 보정계수 및 난이도는 1.0 이상만 적용

※ 적용 대상 업무는 건설공사의 특성에 따라 업무를 추가하거나, 제외하고 산정할 수 있음

나. 보정계수

분야	항목	보정계수 값
플랜트Ⅰ	a.공사유형	①관로공사, 매립장공사 : 0.8 ②구조물공사(배수지, 저류조, 터널 등) : 0.9 ③플랜트공사(정수, 하수, 폐수처리, 분뇨처리, 폐기물처리, 쓰레기 수송관로 등 ④에 해당하지 아니하는 시설) : 1.0 ④플랜트공사(폐기물처리(소각, 폐기물연료화, 음식물, 재활용, 슬러지처리) 시설로 처리량이 50톤/일을 초과하는 시설) : 1.2
	b.공사성격	①신설 : 1.0 ②확장 : 1.1 ③개량 : 1.2
	c.지역특성	①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.3

※ 여러 유형, 성격, 특성 등이 혼재된 경우 해당 공사비를 기준으로 가중평균한 값 적용

다. 공사난이도

구분		산식
총공사비 50억원이하 (시공단계만 해당)		․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+(건설사업관리기간보정계수 +(0.1*기계설비공사 비중)+0.2)*(총공사비*0.2) (※ 기계설비공사비중 = 기계설비공사비/총공사비)
총공사비 2,000억원 이하	시공 이후 단계	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.1*기계설비공사비중)+0.2 (※ 기계설비공사비중 = 기계설비공사비/총공사비)
	시공전 단계	․공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비)
총공사비 2,000억원 초과		․공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250}
비고		․공사비는 10억원 단위로 하며, 전기·통신·소방 공사비는 제외 ․건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1 ※건설사업관리기간 보정계수의 평균건설사업관리기간은 별표 2 제1호라목에서 직선보간법으로 도출