脫원전 및 친환경 미래에너지 확산을 위한

연료전지 사업제안 요청서

2017. 08.

한  국  토  지  주  택  공  사

【 목  차 】

제1장 일반사항

1. 목적	4

2. 의의 및 절차	4

3. 사업시행 일반조건	4

가. 관련법규의 준수	4

나. 사업제안자의 자격 등	4

다. 사업제안 방법	6

라. 재무적인 투자 및 운영조건	8

마. 총사업비의 조정	9

바. 부산열의 공급	9

사. 행정사항 및 운영조건	9

아. 관리 운영권 설정기간	10

자. 유지보수 및 관리운영	10

차. 위험의 분담	11

카. 사업의 성실이행 보장	11

타. 행정지원 및 권한위임	13

파. 총사업비 등의 산정	13

제2장 세부사항

1. 사업제안의 범위	15

가. 사업시설의 위치 및 규모 등	15

나. 사업시행 조건	15

2. 사업제안 세부조건	16

가. 열 구매 일반사항	16

나. 설계 및 시공기준	16

다. 사업시행자 선정절차	17

3. 사업제안서 제출 및 제안평가	17

가. 제안서 제출	17

나. 제안서 평가	18

다. 사업이행 보증금	19

4. 기타 유의사항	20

제3장 사업 제안서 작성방법

1. 일반사항	21

2. 사업제안서 규격	21

3. 언어, 도량형 단위	22

4. 사업제안 서류의 구성 및 분량	22

5. 제출서류	24

제4장 기타 안내사항

1. 기본약정 체결	24

2. 제안내용 변경	24

3. 연료전지 설치부지의 변경	24

4. 연료전지의 연료	24

5. 우선협상대상자 선정 이후 협의	25

6. 소음저감대책	25

7. 문구의 해석	25

[사업제안서 작성 참고자료 및 작성서식]

【붙임 01】 연료전지 사업 예정부지 및 대전에너지사업단 현황

【서식 01】 사업제안 참가 신청서

【서식 02】 사업제안서 표지(1차 정량적 평가)

【서식 03】 사업제안서 일반현황 및 연혁

【서식 04】 법인설립계획서(설립예정법인)

【서식 05】 서약서

【서식 06】 인감 신고서

【서식 07】 출자자 구성

【서식 08】 연료전지 주기기 공급약정 확인서

【서식 09】 재무적 투자 의향서(확인서)

【서식 10】 신재생에너지 공급인증서 구매 약정 의향서(확인서)

【서식 11】 총 사업비 산정

【서식 12】 총 사업비 및 총 투자비 산정

【서식 13】 추정 손익 계산서

【서식 14】 청렴계약 이행 계약서

【서식 15】 사업수행능력 평가표

【서식 16】 공동수급 표준협정서(분담이행방식)

【서식 17】 합의각서

【서식 18】 근로자 관리보호 이행 서약서

【서식 19】 정보 비공개 동의서

【서식 20】 사업제안서 표지(2차 정성적 평가)

【서식 21】 열 에너지 가격 제안서 - 밀봉하여 제출(2차)

【서식 22】 신용등급확인서

【서식 23】 서면 질의서

제1장 일반사항

1. 목적 : “脫원전 및 친환경 미래에너지 확산을 위한 연료전지 사업제안”과 관련하여 발전사업자 선정계획과 연료전지 발전사업의 건설, 운영 등 사업제안조건을 제시하고자 합니다.

2. 의의 및 절차

가. 발전사업자는 LH 대전에너지사업단에 신․재생에너지(연료전지)를 도입하여  연료전지를 통해 생산된 중온수를 LH 대전에너지사업단에 공급하여야 합니다.

나. 본 연료전지 발전사업은 다음의 2단계로 추진되며 1단계는 적정한 사업자 및 사업계획을 선정하기 위해 LH가 안내하는 방법으로 모집, 평가가 이루어집니다.

1) 1단계 : 우선협상대상자 선정 및 기본협약 체결

2) 2단계 : 실시협약 체결 및 사업 시행

3. 사업시행 일반조건

가. 관련법규의 준수

사업제안자는 본 연료전지 발전사업의 건설 및 운영과 관련하여 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」,「전기사업법」,「집단에너지사업법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「건축법」,「하수도법」등 사업추진 관련 인·허가 법령을 준수하여야 합니다.

나. 사업제안자의 자격 등

1) 사업제안 평가를 위한 참가자격은 효율적이고 안정적인 사업추진을 위하여 다음과 같이 제한합니다.

가) 공고일 기준으로 최근 5년 이내 에너지 관련 사업 실적(신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」,「전기사업법」「집단에너지사업법」등에서 정한 발전설비, 열 및 전기사업)이 있는 업체로서 설비용량 5MW 이상 또는 총사업비 100억원 이상의 설계, 건설, 운영 등의 실적이 있는 업체

나) 참여기업의 신용평가등급은 회사채 BB- 이상 또는 기업어음 B0 이상인 업체

다) 컨소시엄을 구성해 참여하는 경우에는 컨소시엄 주관사가 상기 가), 나)의 조건을 충족하여야 함

라) 재무적 투자자(금융회사가 자본조달 주관사로 참여하는 경우를 포함)가 참여하는 경우 재무적 투자자의 신용평가를 생략함.

2) 사업 제안사는 본 제안요청서에 따른 사업제안 참가 신청서를 법인 또는 설립예정 법인명(법인설립이 가시화된 경우)으로 제출하여야 합니다.

가) 설립예정법인은 사업제안서에 법인설립계획서를 포함하여 제출하여야 함.

나) 설립예정법인으로서 사업시행자(실시협약을 체결한 당사자를 말함) 지정을 받은 경우에는 법인설립계획에 따라 법인을 설립하여야 하며, 동 법인으로 하여금 사업시행자의 지위를 승계하도록 하여야 함

다) 사업시행자는 사업제안서 제출시 제시한 법인 설립 계획서와 같이 출자자 및 지분율 변경 없이 법인을 설립하여야 함.

3) 사업제안 구성원 및 출자자 지분에 관한 사항은 사업의 안정적인 추진을 위하여 다음과 같은 조건을 만족하여야 합니다

가) 본 사업은 건설, 운영, 연료전지 제조·공급, 신재생에너지 공급인증서 구매 등의 분야로 구분하여 분담이행이 가능함. 신재생에너지 공급인증서 구매, 금융조달 등의 분야는 사업참여 의향서(약정 확인서)를 제출하여야 하며, 제안서 제출 후 참여업체 변경, 자본조달 계획 등 주요 사항을 변경 할 경우 LH의 승인을 받아야 함.

나) 신재생에너지 공급인증서 구매의향서, 대출의향서 또는 대출확약서등 사업추진 관련서류를 미제출 할 경우에는 사업신청 자격이 없습니다.

다) 출자자 중 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 같은 법 시행령 제3조에 의한 기업집단의 회사가 공동으로 출자하는 경우 공동출자자 전체를 단일출자자로 간주 함.

라) 기업집단내의 계열사가 공동 출자하는 경우 1명의 대표 출자자를 지정 하여야 하며, 그 대표 출자자만이 공동출자자를 대표하여 출자자로서의 권리를 행사하는 조건이어야 함.

4) 사업제안서 제출 이후 본 사업시설의 준공전까지 대상시설물 건설의 안전성 유지를 위해 자기자본 비율 및 출자지분을 다음과 같이 하여야 합니다.

가) 사업제안자는 대상시설물 건설의 안전성 유지를 위해 자기자본비율을 총 투자비의 100분의 10 이상으로 유지하여야 함.

(협약과정에서 사업주관사가 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 또는 에너지사업자(일반도시가스사업, 집단에너지사업)일 경우 공사 준공시 자기자본비율을 100분의 5 이상으로 할 수 있음.)

나) 출자자의 부도나 본 사업의 건전성 확보를 위하여 부득이 하게 추가적인 출자자 참여 또는 변경하여야 할 경우에는 LH의 사전 승인을 받아야 함.

다) 제안자가 우선협상 대상자로 지정된 후 15% 이상의 지분율을 가진 출자자(동일 기업집단 내 계열기업이 공동출자할 경우에는 15% 미만의 지분율을 가진 개별기업을 포함) 또는 그 출자자의 지분율이 변경되거나 시공자를 변경 할 경우에는 LH의 사전승인을 받아야 함.

라) 제안자가 사업시행자로 지정된 후 15% 미만의 지분율을 가진 출자자 또는 그 출자자의 지분율을 변경한 경우에는 그 합병의 효력발생일로부터 10일 이내에 변경사유 및 내역을 LH에 서면으로 통보하여야 함.

마) 본 사업 실시협약체결 이전까지 상기 자기자본비율 산정과 관련된 새로운 정책변경이 확정될 경우 그 변경사항을 본 사업 실시협약에 반영할 수 있음

5) 사업제안서 제출일 현재 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 부정당업자 제재를 받고 있는 자는 사업제안자 또는 출자자(출자예정자 포함)가 될 수 없습니다.

다. 사업제안 방법

1) 사업 제안자 주관 하에 연료전지 발전시설 및 관련시설 일체를 설치, 운영하여 집단에너지 공급용 연료전지 부산열을 LH 대전에너지사업단에 20년간 공급하며, 연료전지 발전시설(부대시설 포함)은 사업기간 종료 후 원상복구(원상복구 비용 및 방법 등 구체적인 사항은 실시협약에서 정함)를 원칙으로 하되 LH의 요구에 의해 LH 또는 LH가 지정한 자에게 시설 일체를 무상으로 이관하는 것으로 사업제안서를 작성하여 제출하여야 합니다.

가) 설립예정법인의 경우 법인설립계획서를 제출해야 함.

나) 자체자금 투자(추가출자 및 후순위 주주차입금 포함)에 대하여는 출자자의 투자확약서. 다만, 출자자가 재무적 투자자(금융기관, 연기금 등)인 경우 조건부 투자확약서(약정서)의 제출이 가능하며 이 경우 실시협약시까지 투자확약서를 LH에 제출하여야 함

다) 출자자별 출자여력을 평가할 수 있는 서류(신용평가서 등으로 갈음 가능)

라) 타인자본 조달금액에 대하여는 금융기관의 대출의향서, 대출확약서 또는 조건부 대출확약서를 제출하여야 한다.

마) 차입 이외에 기타의 방법으로 자금을 조달하는 경우에는 그 조달계획

바) 사업종료 2년 전부터 발전사업 시행(운영)사는 공작물(부대시설 포함)에 대한 사업시설의 철거, 계속운영, 기부채납 등에 관해서 LH와 상호 협의하여 LH가 결정하되, 시행(운영)사는 이에 따른다.

2) 사업제안은 법인 또는 설립예정법인의 대표자 명의로 하여야 합니다.

3) 사업제안자는 본 사업의 기술적 난이도 및 공사기간 등 특수성을 감안, 사업제안서 제출시 관련시설물의 시공자 선정방법 및 계획을 제시하여야 합니다.

4) 제안자는 사업수행능력 평가 이후 우선협상대상자로 선정된 경우 세부 실시협약 체결전까지 재정분야 전문기관 등에서 작성한 타당성조사 결과서를 LH에 제출하여야 하며, 필요한 경우 LH와 협의해 제출시기를 변경할 수 있습니다.

5) 전문기관의 자격 요건은 4년제 대학교 및 대학 부설 연구소, 설립기준일로부터 3년이 경과한 민간연구소, 설립기준일로부터 3년이 경과한 회계법인 및 법무법인 또는 유사용역 수행 실적으로 최근 5년간 예비타당성조사, 타당성 재조사, 민자적격성조사, 타당성조사, 기본설계 및 실시설계 등 조사와 설계관련 업무를 5회 이상 실시한 실적이 있거나 확인일이 속하는 연도를 제외한 최근 5년간의 전체 용역실적이 200억원 이상인 법인입니다.

6) 사업제안자는 사업수행에 필요한 모든 비용을 총사업비, 운영비 등으로 구분하여 비용항목에 포함해 제안하여야 합니다. 또한 수익률, 운영비, 열 공급가 등이 특정조건에 따라 변할 수 있는 숫자로 사업제안을 하여서는 아니 되며, 공고일 기준 확정적인 단일 숫자로 제안하여야 함.

7) 사업제안자는 사업수익을 예측할 수 있도록 발전 부산열 공급 계획과 부대사업 계획을 제안서에 포함하여야 합니다.

라. 재무적인 투자 및 운영조건

1) 본 사업의 건설·운영에 따른 LH의 재정지원은 없으며, 본 사업 제안에 소요되는 비용의 보상은 일체 없습니다.

2) 본 사업의 수익률과 수열량 및 가격의 결정은 다음 공식을 기본으로 합니다.

[eqn: SUM from { { i}=0} to n { CCi} over {(1+r)} ^{i} =SUM from { { i}=n+1} to N { ORi-OCi} over {(1+r)^{i} }+ SUM from { {i }=0} to N {ANRi} over {(1+r)^{i}}]

n    : 본 사업 시설의 준공시점

N   : 관리운영권 설정기간의 종료시점

CCi : 본 사업 시설의 준공을 위해 매년도 투입되는 비용의 합계

ORi : 매년도 운영수입

OCi : 매년도 운영비용(법인세 제외)

ANRi : 부대사업으로 인한 매년도 순수익(수입-비용)

r    : 사업 수익률(IRR)

3) 사업수익률(r)은 세전, 세후를 각각 제시하여야 하며, 사업제안자가 당해 사업에 대한 투자비, 운영수입, 재원조달비용 등을 감안한 기대수익률에 근거하여 자율적으로 제시하되 그 산출근거를 제안서에 포함시켜 제출하여야 하며, LH(LH가 권한을 위임한 자를 포함)와 사업제안자 간에 협상을 통하여 실시협약으로 정합니다.

4) 실시협약으로 정하여진 사업수익률(r)은 본 사업시설의 건설기간 및 운영기간 중에 원칙적으로 조정이 허용되지 않습니다. 다만, 열 구매량의 축소 또는 열 요금 인하가 전제되는 경우에는 당사자 간의 합의를 통해 사업수익률(r) 조정이 가능합니다.

5) 총사업비(CCi), 운영수입(ORi), 운영비용(OCi), 부대사업(ANRi) 등의 불변 가격은 2016년 12월말 기준으로 산정하여 제출하여야 합니다.(단, 실시협약 체결시 별도의 기준시점을 정하여 조정 또는 재산정할 수 있음)

6) 본 사업 제안에 적용되는 물가변동율은 연 1.5%를 가정하여 작성하며, 사업비 금액단위는 백만원을 원칙으로 합니다.

마. 총사업비의 조정

1) 총사업비는 실시협약(열 수급계약서)에서 정한 금액범위 내에서 사업시설의 공사비 및 자금재조달 결과를 반영한 준공정산을 실시하여 총 사업비를 결정합니다.

2) 관계법령의 규정 또는 실시협약으로 정한 총사업비의 변경사유가 발생하지 않는 한 협약으로 정해진 총사업비는 사후적으로 조정되지 않습니다. 다만, 다음의 경우에 한하여 조정할 수 있습니다.

가) 건설기간 중 물가변동률을 현저하게 상회하거나 하회하는 공사비 등의 변동이 발생하여 총사업비를 조정할 필요가 있는 경우

나) LH의 귀책사유 또는 불가항력사유로 인하여 총사업비가 증감되는 경우

다) 공사비에 직접적으로 영향을 미치는 법령 등의 제·개정으로 인하여 총사업비가 증감되는 경우

라) 인·허가기관의 요구, 지방자치단체와의 협의결과, 민원 등으로 불가피한 사유가 발생하여 총사업비가 증감하는 경우

마) 기타 LH의 요구로 인하여 총사업비가 증감되는 경우

3) 총사업비 증감에 대한 조정사유를 정할 경우에는 동일 사유에 대하여 ‘증가’ 뿐만 아니라 ‘감소’의 경우도 함께 실시협약으로 정합니다.

바. 부산열의 공급

1) 연료전지 발전시설에서 생산하는 부산열을 LH 대전에너지사업단에 우선 공급하여야 합니다.

2) 위 부산열 공급방안을 실시협약에 포함하여야 합니다.

3) 사업기간 내 부산열의 공급에 영향을 미치는 행위, 협약(각종 계약포함) 등을 체결하는 경우에는 LH와 사전에 합의해야 합니다.

사. 행정사항 및 운영조건

1) 공사의 준공 및 확인

가) 사업시행자는 “실시협약 체결 시 정한 기간 내”에 본 사업시설을 완공하여 준공확인을 신청하여야 함.

나) 위항에도 불구하고 LH는 본 사업의 공사시행 중 천재지변 등 불가항력 사유가 발생하거나 열 공급시설 연계 방법 변경 등으로 인하여 사업시행이 지연될 경우 사업시행자와 협의하여 적정한 범위 내에서 그 준공시기를 조정할 수 있음.

2) 소유권 등의 귀속

가) 사업시행자가 건설한 본 사업시설의 소유권은 사업시행자에게 귀속되며 세부사항은 실시협약으로 정함.

나) 본 사업 시행으로 인한 계통한계가격(SMP) 및 신재생에너지 공급 인증서(REC) 판매권한은 사업시행자에 귀속되며, CDM사업에 의한 온실가스배출권(CERs) 등과 같은 부대되는 권한은 LH와 협의하여 결정 함.

3) 초과이윤 공유

사업시행자는 국가정책 변화에 따라 운영과정에서 초과이윤이 발생시 LH와 이익을 공유할 수 있으며, 세부 사항은 실시협약으로 정합니다.

아. 관리 운영권 설정기간

1) 연료전지 발전시설의 소유·수익권 및 운영기간 관련, 준공 후 사업자는 20년 동안 사업부지 사용허가 및 발전시설 운영에 대한 사용·수익권을 보유하며, 향후 LH의 경영상황 변화에 따라 대전 집단에너지시설 매각 시 매수인에게 동일 조건으로 양도합니다.

2) 20년간 사용·수익권의 보장은 「신․재생에너지 보급․이용․촉진에 관한 관련법령」등의 범위 내에서 결정하며 관계법령 및 사업부지 점용허가 조건을 위반하지 않는 한 5년 단위로 갱신합니다.

3) 사업부지 점용료(사용료 또는 대부료)는 감정평가에 의해 결정하며, 5년 단위로 갱신합니다.

자. 유지보수 및 관리운영

1) 사업시행자는 사업부지, 연료전지 발전시설(부대시설 포함) 건설 당시의 기능을 유지할 수 있도록 유지보수를 하여야 하며, 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 공익목적에 맞도록 시설을 관리․운영하여야 합니다.

2) 시설의 준공이후 운영기간 중 투입되는 유지보수 개량 및 수선비(하자보수기간 중의 하자로 인한 보수비용 제외)는 시설의 운영비용으로 계상합니다.

3) LH는 필요하다고 판단되는 경우 사업시행자에게 시설물의 안전관리에 관한 특별법 등 관계법령에서 정한 바와 같이 안전진단을 시행하게 하거나 긴급유지보수를 명할 수 있으며, 사업시행자는 그 이행결과를 보고하여야 하며 이에 소요되는 비용은 사업시행자가 부담합니다.

4) LH는 필요하다고 판단되는 경우 사업시행자에게 시설의 운영에 따른 전력량, 열에너지 발생량, 운영 및 경영실적을 요구할 수 있고 사업시행자는 그 내용을 제출하여야 합니다.

5) 사업시행자는 공작물(부대시설 포함) 관리운영권 설정기간이 만료되기 2년 전에 시설의 철거, 계속운영, 기부채납 등을 위해 LH 또는 LH가 지정하는 자와 공동으로 시설점검을 실시해야 합니다. 사업시설을 기부채납 하기로 협의된 경우에는 기간만료와 동시에 본 사업시설의 관리운영권을 무상으로 LH 또는 LH가 지정하는 자에게 인계하여야 합니다.

가) 공작물(부대시설 포함)을 철거하여 원상복구 하는 경우에는 LH와 방법, 시기 등을 사전 협의해야 함.

나) 시설철거 및 원상복구에 관련된 구체적인 사항(비용 및 방법 등)은 실시협약으로 정함

차. 위험의 분담

사업시행자는 사전에 예측가능하고 보험가입이 가능한 위험에 대해서는 최대한 보험으로 해결할 수 있도록 하여야 합니다.

카. 사업의 성실이행 보장

1) LH는 다음과 같은 사항에 대하여 필요한 사항을 요구할 수 있으며, 사업시행자는 이에 따라야 합니다.

가) 부실시공 방지 또는 공사의 원활한 시행과 시설의 정상적인 운영을 위하여 필요한 경우

나) 관리운영권을 설정 받은 사업시행자가 이용자의 편익을 현저히 저해할 정도로 본 사업시설의 유지관리를 소홀히 한다고 판단하는 경우

다) 사업비 사용의 적정성 확인을 위해 자금집행 실적 및 계획제출이 필요하다고 판단한 경우

라) 본 사업의 목적인 대전에너지사업단의 안정적 열수급이 곤란하게 될 때

마) 대전에너지사업단 수용가의 열공급에 지장을 초래할 경우

2) 사업 시행자가 법령 또는 실시협약을 위반한 경우에는 본 사업시설에 대한 공사의 중지, 변경, 시설물 또는 공작물의 변경․이전․제거 또는 원상회복을 명하거나 기타 필요한 요구를 할 수 있으며, 사업시행자는 이에 따라야 합니다.

3) LH는 공사의 원활한 시행을 위하여 전문기관 또는 지정사업자에게 공사관리를 위탁할 수 있으며, 그 구체적인 사항은 실시협약으로 정합니다.

4) 사업시행자는「건설기술진흥법」,「전력기술관리법」 등 관련 법령에 따라 본 사업시설의 설계 및 공사를 감리할 감리전문회사, 건설사업관리자 또는 감리자 선정과 관련하여 LH와 사전협의를 통하여 공사관련 책임감리 계약을 체결하여야 하며, 구체적인 사항은 실시협약으로 정합니다.

5) 본 사업으로 발생하는 민원은 다음과 같이 구분하여 부담 처리합니다.

가) 사업민원 : 본 사업의 부지 및 지장물의 매수 또는 보상과 관련된 민원이나 본사업의 시행으로 인하여 제3자가 누리고 있던 권리나 이익이 침해됨으로써 발생하는 민원

나) 시공 및 운영민원 : 소음, 악취, 진동, 분진, 교통장애, 기타 주변 환경에 미치는 영향 등 본 사업의 공사 및 운영으로 인하여 직접 발생하는 민원

다) 사업민원은 LH와 협의하여 처리하며, 시공 및 운영민원은 사업시행자의 책임과 비용으로 처리하며 사업시행자는 시공 및 운영민원에 대한 사전 예방책을 마련하고 이에 대해 LH에 보고하여야 함. 다만, 본 사업의 시행과 관련된 사업민원으로서 본 사업의 추진에 지장을 초래하는 경우, 사업시행자는 LH와 동 민원의 해결방안에 대하여 협의하기로 하며, 협의 결과 총사업비의 변경으로 동 민원을 해결하기로 한 경우 LH는 사업시행자가 동 민원의 해결을 위하여 실제로 지출한 비용을 총사업비 중 보상비 항목에 추가 반영 함

6) 본 사업시설의 적기시공을 도모하고 사업의 중도포기를 방지하기 위하여 사업시행자는 실시협약 체결일로부터 10일 이내에 총사업비의 5% 이상에 해당하는 사업이행보증금(현금, 이행보증보험증권 또는 금융기관의 지급보증서)을 LH에 납부(제출)하여야 하며, 동 보증금은 사업시행자가 공사 준공 시까지 실시협약상의 의무를 이행하지 아니하는 경우 LH에 귀속됩니다.

또한, 사업제안자는 상기 항에 의한 보증금을 포함한 사업이행 보증계획을 사업계획서에 포함하여 제출하여야 합니다.

7) 본 사업시설이 사업시행자의 귀책사유로 인하여 실시협약에서 정하여진 기간 내에 준공하지 못 할 경우 다음과 같은 기준에 따라 처리합니다.

가) 사업시행자는 정해진 준공일을 기준으로 기성부분에 대하여 LH의 승인을 얻어야 하며, 준공하지 못한 부분에 대하여는 LH에 지연배상금을 납부하여야함. (단, 관련 인허가, 지장물 등으로 공사가 지체될 경우에는 예외로 함.)

나) 상기의 경우 준공하여야 할 시점의 다음 날부터 실제준공시(준공필증 교부일)까지 사업시행자가 납부하여야 할 지연배상금의 계산은 다음과 같이 함.

- 1일당 지체상금은 총사업비에서 기성부분에 상당하는 금액을 공제한 금액의 0.1%에 해당하는 금액으로 함

다) LH는 지연배상금의 총액이 총사업비의 10% 상당금액에 달하는 경우에는 실시협약이 정하는 바에 따라 필요한 처분을 할 수 있음.

라) 지체상금의 납부 등 정산에 관한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용하여 LH와 사업 시행자간에 실시협약으로 정함.

타. 행정지원 및 권한위임

1) 사업제안자는 집단에너지 공급 및 신재생에너지 보급 등의 관계법령에서 규정한 내용 중 LH가 행할 수 있는 각종 인․허가업무 지원 등의 요구사항을 사업계획서에 포함하여 제출할 수 있습니다.

2) 다른 법률의 인·허가 등과 관련사항은 사업시행자가 처리함을 원칙으로 하되, 필요시 LH가 관련 기관과 협의하여 지원 할 수 있습니다.

3) LH는 본 사업의 시행과 관련된 업무의 일부를 LH가 지정하는 자(기관)에게 위임할 수 있으며, 권한위임 시 본 제안요청서, 실시협약 등에서 정한 제반사항 중 LH를 대리하여 행사할 수 있습니다.

파. 총사업비 등의 산정

1) 총사업비는 본 사업시설의 건설에 소요되는 경비를 통합 한 것으로서 「사회기반시설에 대한 민간투자법 시행령」에서 정한 총사업비의 산정 기준을 준용하여 다음 각각의 비용을 합산한 금액으로 합니다.

항목 내용	내 용
조사비	사업의 시행을 위한 측량비, 기타조사비(엔지니어링산업진흥원 규정에 의한 엔지니어링 사업 대가의 기준에 따름
설계비	공사의 시행을 위한 설계에 소요되는 비용은 엔지니어링산업진흥원 제31조의 규정에 의한 엔지니어링 기술대가의 기준 또는 건축사법 관련규정에 의한 용역대가의 기준에 의함
공사비	공사의 시행을 위한 재료비․노무비․경비․일반관리비 및 이윤의 합계액〔국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제반 규정에 따른 예정가격결정기준과 정부 표준품셈 및 단가(정부고시가격이 있는 경우에는 그 가격을 말한다)에 따름)
보상비 (필요시)	공사의 시행을 위하여 지급되는 토지매입비(건물 및 입목 등의 매입비를 포함) 및 이주대책비와 영업권․어업권 및 광업권 등의 권리에 대한 보상비
부대비	본 사업의 시행과 관련한 사업타당성 감리비․사전환경성검토비․사전재해영향성 검토비․열 병합발전사업 등 인허가비용․사업타당성분석비․사후환경영향조사비,건설사업관리비(CM․PM)․공사비 단가 검토비․설계의 경제성 검토비(VE)및 재원조달을 위한 금융 부대비용 등
운영 설비비	시설의 운영을 위하여 최초로 투입하는 장비․설비 및 기자재의 가액
세금, 공과금, 부담금 등	공사의 시행․준공․등기 및 소유권 이전과 관련한 취득세․등록세․부가가치세 등 각종 세금 및 공과금과 기타 법률에 의하여 부과되는 각종 부담금

2) 총사업비의 변경

관계법령의 규정 또는 실시협약으로 정한 총사업비 변경사유가 발생되지 않는 한 실시협약으로 정하여진 총사업비는 사후적으로 조정되지 않음.

3) 운영수입(ΣORi)의 산정

운영수입은 본 사업시설의 준공 후 운영기간 또는 관리운영권 설정기간 동안의 수입액 등 본 사업시설의 운영을 통해 얻게 되는 예상수입액으로 산정하며, 사업제안자는 자기 책임으로 연차별 수요를 추정하여 제시하고 이를 근거로 사용료･운영수입을 산정하여 제시하여야 함.

4) 운영비용(ΣOCi)의 산정

가) 운영비용은 본 사업시설의 준공이후 운영기간 중 투입되는 보수․개량 및 대수선비 등을 고려하여 운영에 소요되는 비용을 합산한 금액임.(법인세 제외)

나) 사업제안자는 본 사업의 특성에 맞게 항목별 근거자료를 첨부하여 인건비와 일반경비를 제시하여야 함

다) 운영기간 중 재원조달과 관련된 금융비용은 사업수익률(r)에 의해 반영되어 있고, 감가상각비(창업비·개업비·영업권 등의 상각비 포함)는 시설사용기간 동안의 총사업비 회수분에 의해 보전되므로 운영비용 항목으로서 별도로 계상하지 않음.

라) 본 사업의 유지보수비 등 운영비용이 사업시행자를 지정할 때 결정된 운영비용을 초과하는 경우에는 출자자가 추가출자 등의 방법으로 그 부족액을 충당하여야 함.

마) 천재지변 등 불가항력 사유의 발생 또는 LH의 요구에 의한 운영비용의 추가 등 실시협약으로 정한 운영비용 초과사유 이외의 사유로 인하여 운영비용이 초과된 경우 이는 재정지원 또는 관리운영권설정기간이나 사용료 조정 대상에 해당되지 않음.

제2장 세부사항

1. 사업제안의 범위

가. 사업시설의 위치 및 규모 등

1) 설치위치 : 대전광역시 유성구 도안동로 323 LH 대전에너지사업단내

고객주차장 부지(붙임 1 : 설치위치 참조)

2) 사업기간

가) 준비기간 : 우선 협상대상자 선정일로부터 약 90일(협약체결 및 인허가지원 등)

- 우선 협상대상자 선정후 14일 이내 기본약정 체결

나) 공사기간 : 준비기간 종료일로부터 18개월(시운전 기간 3개월 포함) 이내

다) 운영기간 : 발전사업 운영개시일로부터 20년(5년 단위로 부지사용허가 갱신)

3) 시설규모 : 연료전지 발전시설 11.44MW 내외

4) 설비구성 : 연료전지 발전시설, 백연 저감설비, 열·전력공급 관련 설비 등

나. 사업시행 조건

1) 기본사항 : LH 대전에너지사업단에 안정적 열공급이 이루어져야 하며, 사업 시행 시 LH의 재정 부담이 없는 조건

※ 사업부지 지상 1층에 법정 주차대수 66대 이상 확보

2) LH : 사업 시행자에게 사업부지 제공(점용료 : 감정평가 금액)

3) 시행사 : 연료전지 발전시설 건설 및 운영 재정투자(조달), 발전 부산열을 LH 대전에너지사업단에 판매

※ “사업시행 조건”은 실시협약시 상호협의를 통해 조정 가능

2. 사업제안 세부조건

가. 열 구매 일반사항

1) 시작연도: 2019년 12월

※ 열 공급시설 설치 및 운영계획에 따라 열 구매 개시시점 변경 가능

2) 수열기간 : 발전사업 개시일로부터 20년

3) 수요처 : LH 대전에너지사업단

4) 수열지점 : 열원 시설까지 공급하는 것을 원칙으로 하며, 수열을 위한 공급설비 및 부대설비 일체를 포함합니다.

5) 수열온도: 100℃ 이상의 중온수

6) 중온수 압력 : 4~15kg/㎠(집단에너지 공급시설과 연계 가능토록 설계)

7) 수열 기준단가(연평균) : 30,000원/G㎈(평가 기준가격, 부가세 별도)

※ 수열단가 산정 가격 기준일은 공고일 기준 가격입니다.

8) 사업시행자가 수열기간 동안 공급하는 열 공급 가격은 도시가스 요금과 연동하여 조정되며, 세부적인 사항은 실시협약으로 정함

나. 설계 및 시공기준

1) 발전사업자는 LH 대전에너지사업단에 신․재생에너지(연료전지)를 도입하여 연료전지를 통해 생산된 중온수를 LH 대전에너지사업단에 공급하는 것으로 설계에 반영하여야 합니다.

2) 연료전지 발전시설의 설계 및 시공은 LH, 대전광역시, 대전광역시 유성구청 등과 협의하여 세부설계 및 시공기준을 정합니다.

3) 사업 예정부지 정비 및 열수송관, 송전선로 등의 설치를 위한 지하 및 지상의 지장물 조사와 해당시설의 이설과 원상복구는 사업자의 부담으로 처리하며, 원상복구 등에 관한 구체적인 시행방법은 LH와의 협의에 따릅니다.

4) 사업 시행자는 착공 및 열 수급 계약 체결 전까지 사업시행자 부담으로 점용허가, 건축허가 등의 관련 인·허가 행정절차를 이행하여야 합니다.

5) 연료전지 발전시설에서 발생하는 수증기로 인한 백연현상이 사업부지 냉각장치를 설치한 층으로 부터 높이 10미터 이상으로 20일 이상 초과 될 것으로 예상되는 경우 발전시설의 부대시설로 백연저감 설비를 추가 설치하여야 합니다.(설비배치계획 수립시 백연발생 높이는 재조정될 수 있음)

6) 수열계통구성은 LH지역난방공급계통과 연동한 축열조 축․방열 운전을 검토하여 반영하여야 합니다.

7) 연료전지 발전시설의 소음레벨은 피해예상지역 부지경계선측정값이 45db(A) 이하이어야 합니다.

8) 사업부지여건 및 주변지역 개발계획을 반영한 연료전지 시설물 설치계획을 제시하여야 합니다.

다. 사업시행자 선정절차

제안서 및 가격평가(협상에 의한 계약 체계기준 평가방법 일부참조) → 우선협상대상자 선정(70이상 고득점자순) → 협 상 → 사업시행자 선정 및 실시협약체결 → 사업시행 순으로 진행합니다.

3. 사업제안서 제출 및 제안평가

가. 사업제안서 제출

1) 설 명 회 : 없음

2) 접 수 일 : 2017.10.18.(수) 10:00～16:00까지 (인편 접수)

3) 제출장소 : 한국토지주택공사 환경에너지전력부(경남 진주시 충의로 19)

4) 제출서류

가) 사업제안 참가 신청서	1부

나) 객관적(정량적) 평가서류        1부

다) 주관적(정성적) 평가서류(제안서)  20부(cd 1장).

라) 열 에너지 가격제안서(밀봉 제출) 등  1부.

나. 제안평가

1) 평 가 일 : 접수시 평가일정 별도안내

2) 평가방법 : 정량적 평가(20%) + 정성적 평가(40%) + 가격평가(40%)

3) 배점방법 : 정량평가의 세부항목 실적은 콘소시엄 참여자 전체(출자자 제외)를 합산하여 계산한다. 단, 신용등급은 주관사의 등급을 따릅니다.

4) 열 구매가격 등 평가결과 합계 점수 70점 이상 득한 경우 우선협상대상자를 선정하고 고득점자 순으로 세부사항 및 열 구매 가격 등을 LH와 협상하며, 제안서 제출자가 1인 이하인 경우에는 추후 별도 공고합니다.

5) 제안서 종합 평가결과 동점이 발생하는 경우 열 공급가격을 낮게 제시한 곳을 우선협상대상자로 지정하며, 열 공급가격 동점일 경우에는 제안서 평가위원회에서 기준을 정하여 결정합니다.

6) 제안서 평가위원회는 LH 관련 전문가로 구성･운영합니다.

7) 정성평가항목 평가기준

- 평가항목별 상대 평가 후, 위원별 최고 득점을 기준으로 순위에 따라 배점 만점의 차등 폭 간격으로 점수 강제 차등

- 각 위원별 점수를 합산하여 정성평가 점수 산정

8) 가격평가 항목의 제안 가격이 40,000원 이상시 평가위원회의 심의 결과에도 불구하고 재공고 할 수 있습니다.

구 분		평 가 항 목		배점 한도	비 고
계				100
기술 능력 평가	정량 평가 (객관적 지 표)	․ 에너지 관련 실적 (설계, 건설, 운영 등 최근 5년간 실적)	15	20	․ 사업담당자 평가 【 평가지표 계량화 】
		․ 신용등급	5
	정성 평가 (주관적 지 표)	․ 사업 및 건설 공사 계획	15	40	심사위원 평가
		･ 관리운영계획, 사용료 수입 및 지출 계획 등	10
		･ 재원조달 방안	5
		･ 소음저감등 민원방지 대책	5
		･ 홍보 및 미관향샹 계획	5
가격평가 (열 공급 적정성)		․ 평가산식(평가결과 40초과 하는 경우 “0점” 처리) {100 -[(제안가격–(30,000×90%))/300]}*40%=가격평점		40	※ 평점산식 적용 가격 단위: 원/Gcal, 부가세 별도

□  정량적 평가

- 배점기준

구 분	배 점 기 준
에너지 관련 실적	규모	30MW 이상	20MW 이상~ 30MW미만	10MW 이상~ 20MW미만	5MW 이상~ 10MW미만
		400억원 이상	300억원 이상 ~400억원 미만	200억원 이상 ~ 300억원 미만	100억원 이상~ 200억원 미만
	배점	15	12	9	6
신용등급 (회사채/기업어음)	등급	AAA~AA-/ A1	A+~A-/A2+~A2-	BBB+~BBB-/A3+~A3-	BB+~BB-/B+~B0이하
	배점	5	3	2	1

주) 1. 에너지 관련 실적은 용량 또는 금액 기준[예)30MW 이상 또는 400억원 이상]이며, 설립예정법인 또는 컨소시엄의 경우 참여사 합산으로 누계실적 배점 부과(분담 비율 미적용)

2. 신용등급은 사업주관사의 등급에 따름

- 총괄 평가표

평가기준	배점	실적	비 고
에너지관련 실적 (설계, 건설, 운영 등)	실적	MW/억원	발전, 전력설비 등
	배점
신용등급	배점		사업주관사의 등급에 따름
합계점수

다. 사업 이행 보증금

1) 기본약정 체결일로부터 60일 이내 실시협약을 체결하고 실시협약 체결 후 10일 이내에 총사업비의 5% 해당하는 보증금(현금, 이행보증보험증권 또는 금융 기관의 지급보증서)을 LH에 납부(제출)하여야 합니다.

2) 사업이행 보증금은 사업시행자가 실시협약으로 정한 계약의 내용을 이행하기 위한 사항으로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제12조 및 같은 법 시행령 제37조 내지 제54조 관련규정에 따라 사업 준공 전 해지 시 보증금은 LH에 귀속되며, 사용․수익권은 취소됩니다.

3) 이행보증 기간은 실시협약상의 준공예정일로부터 30일 이상으로 설정하며 세부사항은 실시협약으로 정합니다.

4) 준공후 운영시의 이행보증을 위한 보증은 실시협약에서 별도로 정합니다.

4. 기타 유의사항

가. 본 사업에 우선 적용 및 준용, 참조 하는 관계법령은 다음과 같습니다.

1)「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법」,「전기사업법」,「집단

에너지사업법」, 「하수도법」 등 관련법령

2) 「사회기반시설에 대한 민간투자법」,「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등

나. 사업제안시 컨소시엄 구성에 관한 사항은 다음과 같이 합니다.

1) 컨소시엄 구성원은 타 컨소시엄에 참여 할 수 없음.(단, 금융조달사, 투자자 등 제외)

2) 사업제안 이후 본 사업 준공 전까지 컨소시엄 구성원이 부도, 자금 재조달, 건설· 운영 효율화 등의 정당한 이유 없이 계약이행 미 참여 해당 참여사는 향후 LH에서 추진하는 연료전지 사업에 참여 자격을 2년간 제한함.

3) 다만, 사업 참여자의 부도, 원활한 자본조달, 발전시설 운영효율화 등을 위해서 컨소시엄 구성원을 변경 할 경우에는 LH의 사전 승인을 득하여야 함.

다. 제안요청서는 LH 홈페이지(www.LH.or.kr) “알림․홍보-알림-공모안내” 에서 제안요청서 서식을 내려 받아 사용하시기 바랍니다.

라. 제안평가 서류는 첨부된 제안요청서에 의거 사실대로 작성하여야 하며, 사업제안 상 중대한 허위사실 발견시 제안접수 철회, 사업시행자 선정취소 및 실시협약을 해지합니다.

마. 제안평가 서류 등의 제안서 작성에 소요되는 비용은 작성자가 부담하여야 하며 제출된 서류는 일체 반환하지 않습니다.

바. 우선협상대상자 선정후, 발전 부산열 구매계획, 사업 준비기간, 사업부지 등 사업추진을 위한 제반사항은 집단에너지 열 공급시설 운영 효율화를 위해 상호 협의하여 변경될 수 있습니다.

사. 기타 사업추진 및 검토와 관련한 문의사항은 LH 도시기반처 환경에너지전력부(담당자 김민진(055-922-3695, e-mail:m3659@lh.or.kr))에 문의하여 주시기 바라며, 사업 제안서 평가에 영향을 미칠 수 있는 사항은 반드시 질의를 통하여 서면 자료로 확인하여야 합니다.

제3장 사업참여 제안서 작성방법

1. 일반사항

가. 사업제안서류 작성 시에는 관계법규 및 제반규정에 위배됨이 없어야 하며, 각 기준이 서로 상이한 경우에는 강화된 기준에 따릅니다.

나. 각종 증명서는 공고일 이후에 발행된 것만 유효합니다. 단 공고일 이전의 것으로 제출함이 불가피한 경우에는 그 사유서를 첨부하여야 합니다.

다. 사업제안서류는 원칙적으로 본 지침에서 제시한 양식을 사용하되 필요한 경우 부속서류에 양식을 추가할 수 있습니다.

2. 사업제안서 규격

가. 사업제안서 및 부속서류(도면 제외)

1) 규    격 : A4(210×297mm) 양면 (필요시 A3를 접어 사용가능)
100페이지 이내(간지, 표지, 부록 제외)

2) 글 씨 체 : 휴먼명조 12 Point   - 줄 간 격 : 130%

3) 여    백 : 상 39mm, 하 19mm, 좌 25mm, 우 21mm(허용오차 ±2mm)

4) 방위표시 : 4자형

5) 표    지 : 색상은 흰색에 재질은 제한 없음

6) 간    지 : 백색지(청색, 적색계열) - 지질:백상지(흰색 120g/㎡ 이하)

7) 인쇄방법 : 프린터로 출력, 복사 또는 마스터인쇄(옵셋 및 필름인쇄는 불가)

8) 제    본 : 사업계획서 3홀(hole) 좌철 바인더(또는 제본) 형태로 제출함

나. 제안서 요약

1) 규    격 : A4(210×297mm) 양면 20페이지 이내 흑백인쇄

2) 내    용 : 사업제안서 내용을 요약한 자료로서 제안서내용과 상이한 자료가 없어야 하며 심의시 사업참여자 발표시 활용될 예정

다. 설계도면

1) 규    격 : A3(420×297mm) 단면

2) 지도, 도면 등 큰 규격의 종이를 사용할 때는 같은 크기로 접거나 별도 제출함.

3) 방위표시 : 4자형(4자형 이외 표기 금지)

4) 표    지 : 색상은 흰색에 재질은 제한 없음

5) 간    지 : 백상지(청색계열)

6) 내용지질 : 백상지(흰색 120g/㎡ 이하)

7) 제    본 : 책자화(좌편철)

8) 인쇄방법 : 프린터로 출력, 복사 또는 마스터인쇄(옵셋 및 필름인쇄는 불가)

※ 설계도면은 시설설치, 열 및 전력설비 설치에 따른 개념도입니다.

라. 별도제출(CD) : 제출된 도서에 수록된 전체내용을 저장하여 제출

1) 설계도면은 Auto CAD-2004 이상으로 작성하고 표준화된 설계도면 작성 및 정보공유를 위한 한글 폰트(사업제안자 제시) 사용지침을 준수하여야 함.

2) 보고서는 한글 2007 이상을 사용

마. 컬러면수 규제

사업신청서를 구성하는 전체 서류의 총 컬러면수는 10면을 초과할 수 없음.

3. 언어, 도량형 단위

가. 사업제안서는 한글로 작성함을 원칙으로 하되, 명확한 의사전달을 위하여 외국어나 한자의 사용이 불가피한 경우 한글로 표기한 후, 괄호 안에 외국어나  한자를 병기함.

나. 또한 증빙서류 또는 계약서의 원문이 외국어일 때에는 원문과 함께 한글 번역본을 첨부하되, 분량이 많을 경우에는 요약 번역본을 첨부함

다. 화폐단위는 원화 표시를 원칙으로 하되, 증빙서류 등에 사용된 화폐단위가 외국통화로 표기된 경우 원화로 환산된 수치를 병기함.

라. 도량형은 미터법 사용을 원칙으로 하되, 각종 증빙서류 등이 미터법 이외의 도량형으로 작성되었을 경우 미터법으로 환산한 수치를 병기함.

4. 사업제안 서류의 구성 및 분량

가. 정량적 평가서류

1) 사업제안 참가 신청서는 증빙서류를 준비하여 1부를 제출하여야 함.(사본제출 할 경우 원본대조필 확인)

2) 증빙서류는 사업제안서 작성 참고자료 및 작성서식을 참조하여 작성해야 함.

컨소시엄 구성 시에는 공동수급 협정서, 출자자의 구성, 합의각서 등 필요한 서류를 추가 제출하여야 하며, 신용평가등급에 의한 평가 자료는 공고일을 기준으로 1년 이내에 평가 받아 제출된 신용평가결과를 기준으로 평가함.

나. 정성적 평가(사업제안서 작성)

사업제안자는 다음 각 호와 같은 사항을 적은 사업계획을 포함하여 사업제안서를 작성하여 제출하여야 하며, 사업제안서에는 사업추진 시행사의 구성, 자금조달 계획, 손익계산서 등의 자료를 LH에 원본과 함께 관련 전산 화일을 함께 제출하여야 함.

1) 사업계획 내용[기본사업계획 도서(圖書)포함]

가) 사업추진 세부계획, 일정, 시설계획, 설계, 공사, 감리 선정방법 및 계획 등

2) 총사업비 명세 및 자금조달계획

가) 총사업비 세부명세

나) 자금조달 세부계획

3) 연료전지 발전시설의 건설 및 운영(11.44MW 내외)

가) 연료전지 발전시설에 부지작업 및 전지제작, 납품, 설치, 시운전,

나) 연료전지 운영개시부터 사업종료시까지 운영계획

4) 사용기간 또는 소유·수익 기간 산정 명세

가) 기간 동안 수익 등 운영사업 등 적성성

5) 시설의 관리운영계획

가) 연료전지 발전에서 열배관 종단부까지 시설관리 및 인력운용계획 등

6) 사용료 등 수입 및 지출 계획

가) 연료전지 발전사업 관련 사용료 등 수입 및 지출계획

7) 부대사업을 시행하는 경우(그 내용 및 추진사유 등)

8) 기타 열 판매 단가를 낮추기 위한 실행 대안 등 자율 제시 등

※ 연료전지 발전시설 운영, 발전부산열 재이용과 관련하여 국내 적용사례가 없는 기술(폐열회수 설비 등)을 도입해 사업을 제안할 경우 연료전지 설비 운영에 대한 보증(성능보증 등)에 대한 서류가 제출되어야 함.

5. 제출서류

붙임 서식을 참조하여 작성 제출하되, 기타 제안서 설명과 관련하여 필요한 서식 자료는 「사회기반시설에 대한 민간투자법」, 관련고시 및 지침 등을 준용하여 작성

제4장 기타 안내사항

1. 기본약정 체결

가. 우선협상대상자로 선정된 사업자는 선정 통보일로부터 14일 이내에 LH와 기본약정을 체결합니다.

나. 기본약정은 LH가 본 사업 추진을 위해 필요한 주요사항과 사업자가 요구하는 내용을 주 내용으로 하여 향후 일정을 포함합니다.

2. 제안내용 변경

가. 제안사업자가 우선 협상대상자로 선정된 경우 제안서의 내용을 준수해야 합니다.

나. 제안서의 내용이 변경되는 경우 이유와 조정내용을 명시해 LH와 서면으로 협의하여야 합니다.

다. LH는 사업자의 협의조정 요구에 정당한 사유가 없다고 인정되거나  본 사업의 정상추진이 곤란하다고 판단되는 때에는 협의를 거부할 수 있습니다.

3. 연료전지 설치부지의 변경

가. 연료전지 발전사업 설치부지는 본 안내서에 제시된 부지이나 사업추진 상 부득이한 경우 장소를 변경할 수 있습니다.

나. 이 경우 LH는 사업자(우선협상대상자 또는 사업시행자)에게 해당사항을 안내하여야 하며 사업자는 특별한 사유가 없는 한 수용하여야 합니다.

4. 연료전지의 연료

가. 본 사업의 연료전지 연료는 도시가스(NG)이며 대전광역시 도시가스 사업자로부터 공급받아야 합니다.

나. 다만, 사업자가 사업의 성공적 추진과 경제성의 획기적 개선을 위해 타 연료의 사용을 제안할 수 있으며, 이 경우 LH는 주민 수용성 및 편의성, 경제성의 개선, 안전성 등을 종합 판단해 타 연료 수용여부를 결정할 수 있습니다.

다. 사업자가 타 연료의 사용을 제안하여 채택되지 않을 경우에도 본 사업 제안평가에 영향을 미치지 않습니다.

5. 우선협상대상자 선정이후 협의

가. 우선협상대상자는 LH의 요청에 의해 「사업추진협의회」를 즉시 구성․운영하여야 하며, 주 1회 이상의 정기 협의와 필요할 때 수시로 개최하는 수시협의를 열어야 합니다.

＊ 특별한 사안이 없는 경우에는 협의에 의해 회의 일정을 조정할 수 있음

나. 우선협상대상자는 협의회 회의록을 작성하고 참석자의 날인을 받아 사본을 교부하여야 합니다.

다. 우선협상대상자는 협의회 회의록을 본 사업 종료 시까지 보관하여야 하며, 컨소시엄 참여사, 출자자, LH 등이 요구하는 경우 원본을 열람할 수 있도록 협조 하여야 합니다.

6. 소음저감대책

사업제안자는 연료전지에서 발생하는 소음에 대한 저감 대책을 제시하여야 하며, 제안서 평가 시 이를 반영합니다.

7. 문구의 해석

가. 제안서 작성 시 문구해석이 어려워 작성 곤란한 경우에는 질의서를 작성 질의 기한 내 제출하여 주시기 바라며, 질의에 대한 답변은 기한 종료일로부터 5일 이내 LH에서 회신합니다.

나. 제안요청서 및 제안서의 문구와 제시내용 중 해석상 차이가 있는 경우에는  LH 해석에 따르며, 제안사는 이의를 제기할 수 없습니다.

[붙임 자료]

연료전지 사업 예정 부지 현황도

□ 설치 위치 : LH 대전에너지사업단내 고객주차장 부지

□ 부지 면적 : 약 1,200㎡ (지상 1층 : 법정 주차대수 66대 이상 확보)

대전에너지사업단 현황

구 분	시 설 현 황
사업유형	ㆍ열 : 수용가판매 ㆍ전기 : 한전판매
추진경위	ㆍ‘04.05.11 : 최초사업허가 ㆍ‘08.05.30 : 공사착공 ㆍ‘10.07.15 : 최초 열공급 ㆍ‘11.01.14 : 종합준공
시설개요	ㆍ공급용량 (허가사항) - 열 : 322Gcal/h - 전기 : 48.3MW
	ㆍCHP : 48.3MW+90.2Gcal/h - ST : 48.3MW+90.2Gcal/h - 증기보일러 : 203t/h
	ㆍPLB : 68Gcal/h × 2기, 96Gcal/h× 1기(232Gcal/h) ㆍ축열조 : 25,000㎥
	ㆍ최대열부하 : 289Gcal/h ㆍ열관로길이 : 850A, 27Km× 2열
	ㆍ대 지 면 적 : 34,268㎡ ㆍ건축 연면적 : 13,062㎡
열공급 세대수	ㆍ허가현황 : 24,619호 ․공급현황 : 25,728호

[서식 1]

사업제안 참가 신청서

회 사 명 (대표회사)		연 락 처
대 표 자		사업자등록번호
담 당 자 (직위)		이메일(연락처)	@ ( - - )
소 재 지
대리인 등록시	본 제안에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 생년월일 :
당사는 LH에서 추진중인 ‘대전에너지사업단내 열 공급을 위한 연료전지 발전사업자 모집 안내공고’에 관한 사업제안 공모에 참여하기 위하여 사업제안요청서에 따라 참가신청서를 이와 같이 제출합니다. 2017년 3월 일 신청인 (인) 첨부 1. 공모참가자격을 증명하는 관련서류 사본 각 1통 2. 법인등기부 등본 각 1부. 3. 법인인감증명서 각 1부. 4. 사업자등록증 및 면허증사본 각 1부. 5. 기타 공고로서 정한 서류 각 1부. 한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 2]

접수번호

제  안  서(1차 정량적 평가)

(脫원전 및 친환경 미래에너지 확산을 위한 연료전지 사업제안)

2017.   .    .

기 관 명	대 표 자
	(인)

※ 기관명, 대표자는 1부에만 기재 후 날인, 잔여 부수는 기재하지 않고 빈칸으로 둠

[서식 3]

사업제안자 일반현황 및 연혁

회사명		대표자	성명
법인등록번호			생년월일
사업자등록번호		본사
업태		사업장
종목
주요제품		설립일자
납입자본금	백만원	결산일
총자산	억원	주거래은행
매출액	억원	종업원수		명
공모참가자격 제한 및 정지현황
법인 연혁

※ 각 출자자 컨소시엄 참여자별로 작성하며, 총자산 및 매출액은 가장 최근의 회계연도에 대한 내용 기재

※ 공모참가자격 제한․정지란은 최근 3년 이내 제한․정지된 실적기간 및 사유 기재

※ 법인연혁은 설립 이후 현재까지의 영업, 재무, 관계회사 투자 등 주요 특기사항을 간략하게 기재하되, 증빙서류가 있는 경우 첨부

[서식 4]

법인설립계획(설립예정법인인 경우)

상 호		대표자	성 명
본 사			생년월일
사업장		발기인수
설립자본금 (수권자본금)	/	발기연월일
종업원수		설립예정일
주거래은행		결 산 월
<법인설립 계획 일정>

[서식 5]

서   약   서

업 체 명 :

주    소 :

당사는 사업 신청 서류의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였고, 이에 따른 법률적, 재정적, 행정적 책임을 감수하겠습니다. 또한, 건설사업 이후 사업기간 내 운영·관리를 충실히 하여 시민의 편의를 최대한 보장하겠습니다.

만일, 추후 고의나 과실을 불문하고 허위사실이 밝혀질 경우, 사업시행자 지정취소, 법적 불이익 등 어떠한 행정처분도 감수하겠음을 서약합니다.

1. 본 법인은 사업 신청 서류의 원본과 사본을 동일하게 작성하였습니다.

2. 본 법인은 사업시행자로 지정되는 경우 사업의 준공 이후 사용기간 동안에 운영관리를 충실히 하고, 특정인에 대해 부당한 사용제한을 하지 않는 등 시민의 편의를 최대한 보장하겠습니다.

3. 본 법인이 사업시행자로 지정되는 경우 관련 법령 및 규정, 제안요청서, 협의된 사업계획 등에서 정하는 제반조건을 성실히 이행하겠습니다.

4. 시설의 건설기간 중 예비비를 초과하는 공사비용이 발생하거나, 소유․수익권 설정기간 중 운영자금 부족액이 발생하여 금융기관의 대출금 등으로 전부 충당되지 않는 경우에는 그 부족액에 대하여 각 출자자의 지분율에 상응하는 금액(기존법인의 경우 전액)만큼 각 출자자가 추가 부담하겠습니다.

20  .    .    .

법인등록번호 :

대표자 성명  :                (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

주) 컨소시엄의 경우 각 출자자의 기명날인은 별도 첨부하거나 MOU 등 위임 관련서류를 첨부함.

[서식 6]

인 감 신 고 서

인 감	주 소 상 호 대 표 자

위 인감은 본 사업제안자가 사용하는 인감으로서 “脫원전 및 친환경 미래에너지 확산을 위한 연료전지” 사업의 사업 제안시 부터 실시협약 체결시(법인설립 전)까지 LH에 제출하는 제반서류에 사용하겠으며, 위 인감 사용으로 인한 법률상의 모든 책임은 본 사업제안자가 질 것을 확약하고 이에 인감 신고서를 제출합니다.

붙 임 : 법인인감증명서(설립예정법인은 대표출자자의 법인인감증명서) 1부.

2017년   월   일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                      (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

주) 출자자가 외국인인 경우 서명 및 서명감(Directory Authorized Signature)을 제출

[서식 7]

출 자 자  구 성 현 황

구분	출자자명	소재지	출자비율 (시공 지분율)	총 투자비 대비 비율	구성원의 역할
합계			100%

주)

1) 출자지분율이 높은 순으로 작성

2) 구분 란에는 건설출자자, 운영출자자, 재무적 투자자 등을 표시함.

3) 구성원의 역할 란에는 사업주간사, 시공사, 운영사 등을 표시함

4) 기업집단 내 계열회사가 공동으로 출자하는 경우 주사업자 및 계열회사 전체출자내용을 기재하고 그 아래에 개별출자자 및 출자내용을 ( )로 표시함.

5) 출자비율 중 시공사의 ( )는 시공지분율을 의미함.

[서식 8]

연료전지 주기기 공급 의향서(확인서)

업체명 :

소재지 :

대표자 :

당사는 LH가 안내하는 「脫원전 및 친환경 미래에너지 확산을 위한 연료전지 사업제안」공고에 따른 사업자 모집에 당사가 제조 또는 판매하는 다음 연료전지 주기기를 위 사업자에게 공급할 의향이 있음을 확인합니다.

□ 연료전지 용량 : 연료전지   MW(형식 :                )

□ 공급약정기간 : 20 .   .   . ～ 20  .   .   .

□ 공급조건 : 사업에 참여한 모든 자에게 동일한 가격과 운영유지비로 차별 없이 연료전지 주기기를 공급함.

첨부 : 증빙서류사본(해당시)  1부.

2017년   월   일

연료전지 제조 또는 판매사

업체명 :

소재지 :

대표자 :                    (인)

[서식 9]

재무적 투자 의향서(확인서)

업체명 :

소재지 :

대표자 :

당사는 LH가 안내하는 「脫원전 및 친환경 미래에너지 확산을 위한 연료전지 사업제안」공고에 따른 사업자 모집에 당사는 재무적 투자(금융 주관사)로서 동 시설의 설치 또는 운영에 소요되는 금원을 본사의 투자승인 등의 절차에 따른 최종승인을 조건으로 재무적 투자자로 참여(대출, 금융증서 등) 할 의사가 있음을 확인합니다.

□ 공급약정기간 : 20 .   .   . ～  20  .   .   .

□ 공급조건 : 사업자로 선정될 경우 약정액을 제공(투자, 조달 도는 금융주선 등)함

첨부 : 증빙서류사본(해당시)  1부.

2017년   월   일

금융주관사

업체명 :

소재지 :

대표자 :                    (인)

[서식 10]

신재생에너지 공급인증서 구매 의향서(확인서)

업체명 :

소재지 :

대표자 :

당사는 LH가 안내하는 「脫원전 및 친환경 미래에너지 확산을 위한 연료전지 사업제안」공고에 따른 사업자 모집에 당사는 신에너지 및 재생에너지 보급 촉진법 제12조의5에 따른 신ㆍ재생에너지 공급의무 발전사업자로서 동 발전시설 운영에 따라 발생하는 신재생에너지공급인증서를 상호 협의에 따라 구매 할 예정임을 확인합니다.

□ 구매약정기간 : 20 .   .   . ～ 20 .   .   .

□ 공급조건 : 사업자로 선정될 경우 동 시설 운영에 따라 발급되는 신재생에너지 공급인증서 구매

첨부 : 증빙서류사본(해당시)  1부.

2017년    월    일

발전사업자

업체명 :

소재지 :

대표자 :                    (인)

[서식 11]

총사업비 산정

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	년	년	년	년	년
① 조 사 비
② 설 계 비
③ 공 사 비
④ 보 상 비
⑤ 부 대 비
⑥ 운영설비비
⑦ 제세공과금
⑧ 영업준비금
계 ∑(①～⑧)

주) 1. 사회기반시설에 대한 민간투자법시행령 제22조의 규정을 준용하여 작성

2. 2017년 2월 기준의 불변가격기준으로 작성함.

[서식 12]

총사업비 및 총투자비 산정

(단위 : 백만원)

구 분	합계	년	년	년	년	년
조 사 비 설 계 비 공 사 비 보 상 비 부 대 비 운영설비비 제세공과금 영업준비금
총사업비(불변)
예 비 비 건설이자
총투자비

주) 1. 물가변동율 1.5%를 적용

2. 작성기간 : 2017년 ～    (20년간)

[서식 13]

추정 손익 계산서

(단위 : 백만원)

과 목	년	년	년	년	년	년	년	년	년
매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판매비와 일반관리비 영 업 이 익 영 업 외 수 익 영 업 외 비 용 법인세전순이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익

주) 작성기간 : 2017년 ～    (20년간)

[서식 14]

청렴계약 이행 서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 LH에서 시행하는 ‘脫원전 및 친환경 미래에너지 확산을 위한 연료전지 사업제안(이하 “본 사업”이라 한다)’ 입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직․간접적으로 업무를 수행한 자 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

- 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하여 낙찰을 받은 자는 LH에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,

- 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 LH에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 11개월 이상 1년 1개월 미만 동안 참가하지 않고, 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰자격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 자는 LH에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 5개월 이상 7개월 미만 동안 참가하지 않으며,

- 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결․계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 심의위원 등에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호 각목의 1에 해당하는 기간 동안 LH에서 시행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

1) 2억원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 2년

2) 1억원 이상 2억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년

3) 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 6개월

4) 1천만원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 3년

3. 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 심의위원등에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 LH에서 전체 또는 일부 계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 심의위원등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하고 업체의 임․직원(하도급업체나 하도급업체와 직․간접적으로 업무수행 하는 자를 포함)과 대리인이 관계 공무원 또는 심의위원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하고, 제보된 위반 사항에 대하여 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정한 행위가 있는 것으로 판명된 경우 뇌물 제공한 업체는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 LH가 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장 확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 법령에 위반되는 하도급(일괄 하도급, 무면허 하도급, 재하도급)을 하지 않겠으며, 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

7. 경쟁입찰과 관련한 담합으로 인하여 발주처에 손해를 가했을 경우 다음 각 호의 금액을 배상토록 하겠습니다.

1) 담합에 따라 결정된 낙찰가격과 담합이 없었을 경우 형성 되었으리라고 인정되는 가격의 차액

2) 담합으로 인하여 입찰이 유찰된 경우 입찰공고 및 현장 설명회 개최 등 재입찰에 소요되는 각종 행정비용

3) 담합으로 인하여 당해 발주사업 기간의 연장이나 지연에 따라 LH에 주는 직·간접적인 손해

4) 기타 LH에서 입증하는 담합으로 인한 유·무형의 손해

5) 위 내용에도 불구하고 구체적인 손해액 산정이 곤란하거나 불가능한 경우에는 계약금액의 10%를 배상하도록 하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호 신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 계약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰 참가자격제한, 계약해지 등 LH의 조치와 관련하여 당사가 LH를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2017년  월    일

20  .    .    .

서 약 자 : (회사명)               대표             (인)

[서식 15]

사업수행능력 평가표(1차 정량적 평가표)

□ 자체 평가결과 총괄표

평가기준	배점	실적	비 고
에너지관련 설비실적 (설계, 건설, 운영 등)	실적	MW	발전, 전력설비 등
	배점
건설운영 등 실적	실적	억원	운영의 경우 2016년 매출액을 기준으로 함.
	배점
신용등급	실적	대표회사□ 건설사□ 운영사□	설립 예정법인은 참여기업을 기준으로 함
	배점
합계점수

※ 배점기준

구 분	배 점 기 준
설비용량 실적	실적	30MW 이상	20MW 이상~ 30MW미만	10MW 이상~ 20MW미만	5MW 이상~ 10MW미만
	배점	8	6.5	5	3.5
건설운영 등 실적	실적	400억원 이상	300억원 이상 ~ 400억원 미만	200억원 이상 ~ 300억원 미만	100억원 이상~ 200억원 미만
	배점	8	6.5	5	3.5
신용등급 (회사채/기업어음)	등급	AAA~AA-/ A1	A+~A-/A2+~A2-	BBB+~BBB-/A3+~A3-	BB+~BB-/B+~B0이하
	배점	4	3	2	1

주) 1. 동일한 실적은 설비용량, 건설운영 항목에 각각 반영 할 수 없음(중복점수 불가)

2. 설비용량 및 건설운영 실적은 설립예정법인 또는 컨소시엄의 경우 참여사 합산으로 누계실적 배점 부과(분담 비율 미적용)

3. 신용등급은 설립예정법인 또는 컨소시엄의 경우 참여사 분담비율로 합산 적용

4. 에너지 관련사업의 범위 : 연료전지 및 신재생에너지, 열병합 발전시설, 집단에너지공급시설, 전력사업 등 에너지 관련분야 실적을 말하며, 공고일을 기준으로 계약(협약)을 체결한 후 착공 단계과정 이상으로 진행중인 사업을 포함.

5. 실적증명 등의 증빙자료 첨부(발주처 등이 발급한 실적증명서), 단 수행중인 사업은 해당계약서 첨부

6. 사업수행 실적 등의 증빙자료는  별도첨부 자료로 참가 신청서와 함께 제출

작성자 : (회사명)               대표             (인)

붙임자료 : 증빙자료 별도 각 1부. 끝.

[서식 16]

공동수급 (표준)협정서(분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래 사업에 참여하기 위하여 공사, 물품 또는 사업에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 사 업 명 : 脫원전 및 친환경 미래에너지 확산을 위한 연료전지 사업제안    2. 설비용량 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 사업지자체와 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명)· 날인과 동시에 발효하며, 당해 사업의 이행으로 종결된다. 다만, 사업지자체나 제3자에 대하여 당해 사업과 관련한 권리·의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 사업지자체에 대한 사업의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용 및 분담비율은 다음과 같이 정한다.

[예시]

가) ○○○건설회사(분담비율 %) : 건설공사 및 설비설치공사

나) ○○○제조회사(분담비율 %) : 설비제작

다) ○○○제조회사(분담비율 %) : 토목공사

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 사업지자체와의 사업내용 변경에 따라 사업비가 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 사업이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제9조 (공동비용의 분담) 이 사업이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제10조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 사업의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 사업지자체와 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 사업을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 사업지자체의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 사업을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여사업 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 사업지자체의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 사업이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2017년   월   일

○○○ (인)

○○○ (인)

[서식 17]

합 의 각 서

공모번호		공모일자	2017년 월 일
공모명

우리는 위의 제안안내에 공동수급체를 결성 사업에 참가하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 안내사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 내용으로 참가하겠으며, 우선협상대상자 선정시 모든 구성원은 대표자가 제출한 제안서대로 이의 없이 이후 절차를 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

2017년   월   일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주 민 등 록 번 호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주 민 등 록 번 호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주 민 등 록 번 호

한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 18]

근로자 권리보호 이행 서약서

당사는 LH에서 시행하는 「脫원전 및 친환경 미래에너지 확산을 위한 연료전지 사업제안」참여업체로서 근로자(하도급업체 포함)의 인권보호․고용안정․노동환경 등의 권리보호를 위해 다음 사항을 이행할 것을 서약합니다.

1. 당사는 근로자가 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리를 누릴 수 있도록 인권보호를 위한 경영정책(관련 법령에 의거 취업규칙 작성·신고 등)을 확립하도록 노력하겠습니다.

2. 근로자에 대하여 인종․종교․신체적 결함․성별․출생지․노동조합 가입여부 등의 이유로 고용·보상·훈련의 기회, 승진, 이직, 퇴직 등에 차별을 하거나 차별을 조장하지 않겠습니다.

3. 산업에 대한 효과적인 지식을 소유하고 안전시설, 휴게시설 등을 설치하여 근로자의 노동환경을 개선하고, 작업과 관련한 사고나 질병을 예방하기 위해 적절한 조치를 취하며 특히, 근로자가 건강과 안전이 위험하다고 판단하여 작업을 거부한 경우 즉시 현장의 문제를 조사하여 조치를 취하도록 하겠습니다.

4. 근로자에게 노동력 착취적인 언어․신체적 접촉과 성적 강압 등과 같은 행위, 정신적 강압이나 언어폭력 등은 허용하지 않고, 근로자의 개인정보나 사생활에 대한 권리를 존중하겠습니다.

5. 근로자에게 관련 규정에 부합한 노동시간 준수 및 휴일 제공으로 근로자  자신과 가족이 건강한 생활수준을 누릴 수 있게 하며, 여성근로자의 모성은 특별한 도움을 받을 권리를 보장하겠습니다.

6. 당사는 근로 중 근로자에게 발생한 문제에 대하여「근로기준법」,「산업재해보상보험법」,「시민건강보험법」등 관련 법령을 준수하여 필요한 조치를 취하며 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임지겠습니다.

2017.  .   .

서약자 : ooo 회사 대표 ooo (서명 또는 날인)

[서식 19]

정보 비공개  동의서

본인은『脫원전 및 친환경 미래에너지 확산을 위한 연료전지 사업제안 공고』와 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며, LH가 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

2017년   월   일

상 호 ( 법 인 명 ) : 주 소 : 대 표 자 : 사 업 자 등 록 번 호 :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 20]

접수번호

제  안  서(2차 정성적 평가)

(脫원전 및 친환경 미래에너지 확산을 위한 연료전지 사업제안 공고)

2017.   .    .

기 관 명	대 표 자
	(인)

※ 기관명, 대표자는 1부에만 기재 후 날인, 잔여 부수는 기재하지 않고 빈칸으로 둠

[서식 21]

열 에너지 가격 제안서
사 업 명
공 고 명
공고번호		제 호(2017 - ○○호)
제안금액		금 원(부가세 미포함)
열 공급조건		중온수 공급 온도 : ℃, 중온수 압력 : kg/㎠ 공급량(Gcal/년) :
신청자	상호/법인명			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대표자			생 년 월 일
	담당직원 연 락 처	소속부서		FAX
		전화번호		E-mail
상기 금액으로 열 공급 가격 제안서를 제출합니다. 붙임 : 가격 세부 산출내역서 1부 2017년 월 일 주관 대표 사업자 : (인) 한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 22]

신 용 등 급 확 인 서

(공인평가기관 발급 확인서 제출)

※ 신용정보이용 및 보호에 관한법률 제4조에 해당하는 업무를 수행하는 신용정보업자에게서   받은 공공기관 제출용 신용평가서

[서식 23]

서 면 질 의 서

업 체 명		전화번호
대 표 자	(인)	이메일	@
소 재 지
질 의 내 용
※ 명료하게 작성 요망 (중요한 사항으로 서면회신이 필요한 경우) ※ 일반적인 사항은 전화문의 가능 ※ 공고문 및 제안요청서를 다시 한 번 숙지하시고 질의하여 주시기 바랍니다. 2017년 월 일 한국토지주택공사 사장 귀하