2024년 OO건설공사 정기안전점검 용역

과 업 지 시 서 (예시)

2024. 00

한국토지주택공사 00지역본부

1. 일반사항

1.1 과업목적

본 과업은 아래의 관련법규에 따라 정기안전점검을 수행하여 건설공사의 품질 및 안전 확보에 기여함을 목적으로 한다.

가. 건설기술진흥법(이하 "법"이라 한다)

나. 건설기술진흥법 시행령(이하“영”이라 한다)

다. 건설기술진흥법 시행규칙(이하“규칙”이라 한다)

라. 건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부, 이하 "지침"이라 한다)

마. 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부, 이하“세부지침"이라 한다)

1.2 과업범위 및 과업범위의 해석·조정

가. 본 과업의 범위는 법 제62조 및 영 제100조 ①의 1, 3 및 4호의 정기안전점검 및 정기안전점검 수준이상의 안전점검(지침의 초기점검)으로 하되, 영 제98조 ①의 6호 가목에 의거 공동주택에 대하여는 층수 제한없이 정기안전점검 및 초기점검을 포함한다.

나. 안전점검 수행에 있어 발생되는 모든 사항은 관련법규 및 본 과업지시서에    의거 시행하되 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 감독원과 협의를 거쳐 시행하도록 한다.

다. 본 과업지시서의 해석상 차이가 발생할 때에는 감독원과 협의하여 결정한다.

1.3 과업 수행기간 및 기간의 조정

가. 본 과업 수행기간은 과업 착수일로부터 해당 건설공사 준공일 이후 3개월까지로 한다.

나. 천재지변 등의 사유에 인하여 과업수행기간을 조정할 필요가 있는 경우 계약당사자간 협의를 통하여 과업 수행기간을 조정할 수 있다.

1.4 용어 정의

가. “감독원"은 해당공사 LH담당 감독 또는 건설사업관리기술인을 말한다. 감독원은 점검기관에게 관련법규 및 본 과업지시서에서 규정하는 업무에 대한 지시, 승인 또는 검사를 행할 수 있으며 이때 중요한 사항은 문서로 한다.

나. “계약상대자”라 함은 LH 안전점검 수행기관 등록명부에 등록된 업체로, 해당 건설현장 “안전점검 기관으로 지정된 업체”를 말한다.

다. “책임기술자"라 함은 구조물 및 부지의 안전성 검토 등 정기안전점검 내용에   대한 전반적인 기술검토를 담당하는 해당 직무분야 특급기술자 또는 건설안전기술사로서 국토부 장관이 인정하는 해당 직무분야의 정밀안전진단 교육을 이수한 자를 말한다.

※ 해당 직무분야

- 단지건설공사(토목) : 토질·지질, 토목구조, 도로및공항, 토목시공, 토목품질관리

- 주택건설공사(건축) : 건축구조, 건축시공, 건축품질관리 및 건축사

라. “참여기술자"는 정기안전점검 업무를 담당하는 초급기술자 이상을 말한다.

단, 최소 중급기술자 1인을 포함한다.

1.5 착수신고

계약상대자는 본 과업 착수일 3일전에 아래 사항을 포함한 착수신고서를 감독원에게 제출하여야 한다.

가. 착수계

나. 안전점검 계획서

다. 현장대리인 및 현장요원계(참여기술자)

라. 인력(장비)투입계획서

1.6 작업일보 제출

계약상대자는 과업수행 전 감독원에게 사전보고하고, 작업완료 후 3일 이내에 아래 사항을 포함한 작업일보[붙임5]를 감독원에게 제출(대면 또는 유선)하여야 한다.

가. 참여 기술자와 장비 투입 현황(누계 포함)

나. 안전점검 결과

다. 기타 특이사항

1.7 계약상대자의 책임

가. 문서의 기록·비치

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계기관과의 협의사항, 감독원의 지시

및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서(사진포함)로 작성하여 보관

하여야 한다.

나. 과업달성의 의무

본 과업의 부분성과 및 최종성과가 그 내용상 계약상대자의 미비, 과오등의 결격사항이 발견된 경우에는 계약상대자의 비용 부담으로 보완조치를 하여야 한다.

다. 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 의거 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의

과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

또한, 안전점검 시 공사시행업체에게 진행 중인 작업 및 건설현장의 위험성에 대하여 교육을 받아야 하며, 안전사고 예방에 만전을 기한다.

라. 법률 준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

마. 보안 및 비밀유지

1) 용역수행 중 인지하게 된 사실에 대하여는 외부에 유출하여서는 안되며 관련자 교육을 통하여 철저히 기밀을 유지하고, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인해 발생한 손해에 대하여 책임을 진다.

2) 과업성과품을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류·관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료 발간 시는 감독원과 협의하여 정부에서 인가한 비밀문서 발간업체에서 발간하되 계약상대자는 발간과정에 입회하여 원지, 폐지 등을 회수 소각한다.

1.8 과업수행자의 교체

가. 참여기술자는 충분한 학력, 경험과 관련법에 의한 자격을 갖춘 자로 하여야 하며 감독원이 과업 수행에 부적격하다고 판단하는 경우 협의에 따라 교체할 수 있다.

나. 본 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자로 감독원의 승인을 받아 교체한다.

2. 과업 내용

2.1 정기안전점검 계획수립

가. 안전점검 계획 수립 시 본 과업이 원활히 수행될 수 있도록 아래 사항을 포함하여 작성하여야 한다.

1) [붙임1], [붙임2]에 따른 정기안전점검 시기 및 주요점검내용

2) 분야별 소요인원 및 구성

3) 비파괴 검사 및 재료시험(필요시) 실시계획

4) 안전점검기간 및 예정 공정표

5) 구조형식에 따른 적정 안전점검 장비선정

6) 현장작업을 위한 안전관리계획 수립

7) 붕괴유발부재, 피로· 취약부위 등 특별부재와 포함여부 검토

2.2 정기안전점검 실시

가. “책임기술자”는 현장점검 기간 동안 반드시 현장에 상주하며 점검을 수행·관리하여야 한다.

나. 다음 자료들을 수집․분석하여 설계와 시공의 적정성 여부를 확인하고, 지하수위 등 현장조건이 설계도서와 부합되는지 여부를 점검하여야 한다.

1) 구조도면, 구조계산서, 시방서, 지반조사보고서 등

2) 기존 안전점검 보고서 및 점검자료(기 발생한 결함 확인 등)

3) 보수․보강 이력(기존 실적이 있는 경우)

다. 시공자가 수립한 안전관리계획의 적정 이행여부를 점검하여야 한다.

라. [붙임1],[붙임2]에 따른 점검항목 및 안전점검계획서의 점검항목별 세부 체크리스트에 따라 안전점검을 실시하여야 한다.

마. 정기안전점검 대상시설물 및 점검시기는「건설공사 안전관리 업무수행지침」[별표1] 및 「LH 안전관리지침」에 따라 시행하며, 세부 조사항목, 점검내용, 시험방법등에 대해서는 감독원 지시에 따른다.

바. 타워크레인 정기안전점검 시행 시 타워크레인 설치작업, 인상작업, 해체작업  진행 동안 “현장대리인”은 현장 상주하여야 한다.

또한, 타워크레인 점검 시「건설기계관리법 시행규칙」 별표9 제2호 나목 1)책임검사원 또는 2)검사원이 동반 점검을 시행하여야 한다.

사. 현장위치, 점검대상 및 점검횟수, 점검 가이드라인을 숙지하고 입찰에 참여하여야 하며, 대가에 반영되지 않은 점검은 감독원의 사전 승인을 득한 후 정기안전점검을 시행하고, 준공 시 정산한다.

※ 「엔지니어링사업대가 산정기준」제8조에 의거 직접인건비(외인 1일 단가)의 10%(왕복, x2)로 산정하고, 행정업무 경감을 위해 실비로 정산하지 않으며, 현장방문 횟수에 따라 정산 시행

아. 책임기술자는 안전점검결과 성능부족 등 결함이 있을 경우에는 지체 없이 감독원에게 통보하여야 한다.

자. 계약상대자는 점검결과 지적사항에 대한 조치결과를 확인하여야 하며 그 결과를 정기안전점검 보고서에 수록하여야 한다.

차. 현장 품질시험 결과의 시방기준 만족 여부를 검토하여야 한다.

2.3 기타사항

가. 관련법령에 의거 계약상대자는 계약현황, 참여기술자현황 등을 해당 협회에 제출될 수 있도록 관련 서류를 감독원에게 제출하여야 하며, “건설기술용역 통합관리시스템”을 통하여 협회에 신고하여야 한다.

변경 시에는 감독원의 사전승인을 득한 후 “건설기술용역 통합관리시스템”을 통하여 협회에 변경신고 하여야 한다.

나. 정기안전점검 대가에 반영되어 있지 않는 건설기계, 가설구조물 정기안전점검비는 「주택기술단-413(2023.02.02)호」 산정기준에 따른다.

다. 정기안전점검 시행 시 점검대상 항목 중「공사안전보건대장」에 따른 산업재해 예방조치 이행여부를 확인하고, 그 결과를 감독원에게 통보하여야 한다.

라. 정기안전점검 대상시설물 중 공동주택(아파트) 구조체 점검시 투입인원을 4명이상으로 하고, (1.6 작업일보 제출) 절차에 따라 감독원에게 제출하여야 한다.

※ 투입인원 : 사업 책임기술자, 분야별 책임기술자, 참여기술자 2인이상(최소 중급기술자 1인 포함)

3. 과업성과품 작성

3.1 작성 요령

가. 안전점검보고서는 체계적으로 작성되어야 하며, 각종 결함이 있을 경우에는 개략도와 사진을 활용하여 결함 위치와 특성에 대하여 이해하기 쉽게 표현하여야 한다.

나. 보고서에 포함된 모든 자료의 근거를 명확히 하여야 하고 안전점검 일시와  각종 시험결과 등 상세한 근거자료를 첨부하여야 한다.

3.2 정기안전점검보고서 작성

책임기술자는 [붙임1], [붙임2], [붙임3]을 기준으로 정기안전점검보고서를 작성한다.

3.3 안전점검 종합보고서 작성

책임기술자는 [붙임4]를 기준으로 정기안전점검 종합보고서를 작성한다.

4. 용역완료 성과품 제출

4.1 제출물

가. 정기안전점검보고서(부록, 관련사진 및 CD 포함) 6부.

나. 안전점검종합보고서(부록, 관련사진 및 CD 포함) 6부.

4.2 제출시기 및 방법

가. 정기안전점검 중간보고서

차수별 시설물별 현장안전점검 완료 후 5일 이내 시설물별로 점검결과(중간보고)를 감독원 및 시공사에게 [붙임6]에 따른 양식으로 제출하여야 한다.

나. 정기안전점검보고서(종합보고서 포함)

차수별 현장안전점검 완료 후 1개월 이내에 정기안전점검 보고서 6부를 제출하여야 한다.

※ 종합보고서의 경우 최종차수(4차 또는 초기점검) 점검 완료 후 1개월 이내

(단, 현장여건 등 특이사항 발생 시 3개월 이내)

※ 감독원 및 건설사업관리기술자 각 1부, 시공사 3부

([붙임8]양식으로 인수·인계서(수급업체 인수인계 확인용)를 작성, 감독원에게 제출)

다. 제출방법, 문서형식 등 세부사항은 “지침”과 “세부지침”을 따른다.

라. 정기안전점검보고서(점검대상 및 차수별) 제출시 LH 건설기술정보시스템(COTIS)에 등록 될 수 있도록 조치한다.

【붙임 1】정기안전점검 대상 및 실시시기

□ LH 안전관리지침

가. 점검대상 (LH시행 공사 추가점검사항)

시행대상	비고
․건진법 시행령 제98조제1항(건진법상 안전관리계획 작성대상 건설공사)	법적의무 대상공사
《안전관리 상 LH 필요에 따른 추가시행 대상》 · 교량(시설물안전법 1종․2종 시설물의 규모에 해당되지 않는 연장 15m 이상 교량을 말하며 이와 유사한 지상경사로, 에코브리지 등을 포함한다) · 연약지반 상에 설치하는 공동구 또는 암거구조물(연장 50m 이상, 공동주택 단지내 시설 제외, 점검비용 산정시 교량요율 적용) · 지하차도 또는 지하보도 (BOX 타입 연장 50m 이상) · 배수지, 가압펌프장(오수중계펌프장), 배수문, 배수펌프장 · 지방하천의 수문 및 통문(시설물안전법 1종․2종 시설물 외) · 공동주택(시설물안전법 1종․2종 시설물 외), 학교시설, 연면적 5천㎡ 초과하는 건축물 · 옹벽(지면으로부터 노출된 높이가 5m 이상인 부분의 합이 50m 이상인 옹벽) · 절토사면(지면으로부터 연직높이 15m 이상을 포함한 절토부로서 단일 수평연장 100m 이상)	LH 추가시행

* 위 대상공사 이외의 건설공사는 감독자(건설사업관리기술인)의 판단에 따라 방침수립 후 실시할

수 있다.

나. 점검시기 및 횟수

1) 실시시기는 ｢건설공사 안전관리 업무수행 지침｣(국토교통부) 제21조 별표 1(건설공사별 정기안전

점검 실시시기)를 기준으로 실시한다.

2) 다만, 감독자(건설사업관리기술인)은 안전관리계획의 내용을 검토할 때 건설공사의 규모, 기간,

현장여건에 따라 점검시기 및 횟수를 조정할 수 있다.

다. 점검사항(건진법 시행규칙 제59조제1항)

․공사목적물의 안전시공을 위한 임시시설 및 가설공법의 안전성

․공사목적물의 품질, 시공상태 등의 적정성

․인접건축물 또는 구조물의 안정성 등 공사장 주변 안전조치의 적정성

․건설기계(높이 10m이상 천공기, 항타 및 항발기, 타워크레인)의 설치(타워크레인 인상을 포함)‧해체 등 작업절차 및 직설기계의 전도‧붕괴 등을 예방하기 위한 안전조치의 적정성

□ 건설공사 안전관리 업무수행지침 제21조 별표1(국토교통부 고시)

건설공사 종 류					정기안전점검 점검차수별 점검시기
					1차	2차	3차	4차	5차
교 량					가시설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설전)	하부공사 시공 시	상부공사 시공 시	-	-
터 널					갱구 및 수직구 굴착 등 터널굴착 초기단계 시공시	터널굴착 중기단계 시공시	터널 라이닝콘크리트 치기 중간단계 시공시	-	-
댐	콘크리트댐				유수전환시설공사 시공시	굴착 및 기초공사 시공시	댐 축조공사 시공시(하상기초 완료 후)	댐 축조공사 중기단계 시공시	댐 축조공사 말기단계 시공시
	필댐				유수전환시설공사 시공시	굴착 및 기초공사 시공시	댐 축조공사 초기단계 시공시	댐 축조공사 중기단계 시공시	댐 축조공사 말기단계 시공시
하천	수문				가시설공사 완료시 (기초 및 철근콘크리트공사 시공전)	되메우기 및 호안공사 시공시	-	-	-
	제방				하천바닥 파기, 누수방지, 연약지반 보강, 기초처리공사 완료시	본체 및 비탈면 흙쌓기공사 시공시	-	-	-
하구둑					배수갑문 공사중	제체 공사중	-	-	-
상하 수도		취수시설, 정수장, 취수가압펌프장, 하수처리장			가시설공사 및 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	구조체공사 초ㆍ중기단계 시공 시	구조체공사 말기단계 시공 시	-	-
		상수도 관로			총공정의 초ㆍ중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-
항만		계류시설			기초공사 및 사석공사 시공시	제작 및 거치공사, 항타공사 시공시	철근콘크리트공사 시공시	속채움 및 뒷채움공사, 매립공사 시공시	-
		외곽시설 (갑문,방파제,호안)			가시설공사 및 기초공사, 사석공사 시공시	제작 및 거치공사 시공시	철근콘크리트공사 시공시	속채움 및 뒷채움공사 시공시	-
건축물		건축물			기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	구조체공사 초ㆍ중기단계 시공시	구조체공사 말기단계 시공시	-	-
		리모델링 또는 해체공사			총공정의 초ㆍ중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-
지하차도,지하상가, 복개구조물					토공사 시공시	총공정의 중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-
도로ㆍ철도ㆍ항만 또는 건축물의 부대시설				옹벽	가시설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설전)	구조체공사 시공시	-	-	-
				절토사면	발파 및 굴착 시공시	비탈면 보호공 시공시	-	-	-
10미터이상 굴착하는 건설공사					가시설공사 및 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	되메우기 완료후	-	-	-
폭발물을 사용하는 건설공사					총공정의 초ㆍ중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-
건설기계			천공기(높이 10미터 이상)		천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시	천공 작업 말기단계시	-	-	-
			항타 및 항발기		항타ㆍ항발기 조립완료 후 최초 항타ㆍ항발 작업시	항타ㆍ항발 작업 말기단계시	-	-	-
			타워크레인		타워크레인 설치작업시	타워크레인 인상시마다	타워크레인 해체작업시	-	-

건설공사 종 류		정기안전점검 점검차수별 점검시기
		1차	2차	3차	4차	5차
가설 구조물 (시행령 제101조의 2)	높이가 31미터 이상인 비계	비계 최초 설치 완료시	비계 최고 높이 설치 완료단계 시	-	-	-
	작업발판 일체형 거푸집	최초 설치 완료시	설치 말기단계시	-	-	-
	높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시	타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시	-	-	-
	터널 지보공	지보공 설치 초기단계시	지보공 설치 말기단계시	-	-	-
	높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공	지보공 최초 설치 완료시	지보공 설치 완료 말기단계시	-	-	-
	브라켓 비계	브라켓 최초 설치 완료시	브라켓 비계 설치시	-	-	-
	작업발판 및 안전시설물 일체화 가설구조물(10m이상)	최초 설치 완료시	가설 구조물 사용 말기단계시	-	-	-
	현장 조립 복합가설구조물	조립ㆍ설치 최초 완료시	가설 구조물 사용 말기단계시	-	-	-

※ 건설공사 안전관리 업무수행지침 [별표 1]에서 정의하고 있는 건설공사 종류 이외의 안전관리계획 수립대상 건설공사의 정기안전점검은 시공자가 정기안전점검 차수별 점검시기를 정하여 건설사업관리기술자의 확인ㆍ검토를 득한 후 발주자의 승인을 받아 시행한다. 이때 점검차수는 최소 2회 이상 실시하여야 한다.

※		점검업체 평가실시 기준차수(해당용역의 주요공종 기준차수 완료시 평가 실시). 단, 건축물의
		경우 ‘LH 정기안전점검(건축물) 점검시기 (붙임2)’ 3차 및 5차 완료시 평가 실시

【붙임 2】 LH　정기안전점검(건축물) 점검시기

점검 시기	조사 항목	주요 점검 내용 및 시험방법	비 고
공 통	▪가설공사	- 울타리, 방음벽, 가설전기, 타워크레인, 동바리 (잭서포트 포함), 거푸집, 비계, 안전난간, 추락방지 시설, 낙하물방지망등 안전시설물(구조계산확인)
	▪토공사(굴착, 성토 및 절토)	- 흙막이, 사면안전성, 배수 및 계측관리
	▪안전관리계획서	- 안전관리계획서의 적정 이행여부, 대상 시설물별 안전관리의 적정 이행여부
	▪품질관리(시험)계획서	- 품질시험 결과(철근, 콘크리트 등) 주요자재의 시방기준 만족여부
	▪공사장 주변 안전조치	- 인접구조물 및 현장주변 정리정돈 상태
	▪점검계획 수립시 정한 점검항목	- 점검계획 수립항목에 대한 점검내용
1차점검 (기초 콘크리트 타설 전)	▪지정공사 및 기초공사	- 지반조사보고서 검토, 기초공법 적정성 - 말뚝 두부정리, 편심, 보강타 등
	▪ 기초공사 시험결과 검토	- 말뚝재하시험, 평판재하시험 결과 확인
	▪ 철근공사	- LH 구조공통도 및 구조도면에 의한 간격, 위치, 피복, 이음, 정착길이, 결속, 스페이서, 기초두께
2차점검 (지하층 철근배근 완료후)	▪ 철근공사	- LH 구조공통도 및 구조도면에 의한 간격, 위치, 피복, 이음, 정착길이, 결속, 스페이서	※ 지하층 철근배근 완료시 점검하되 무량판 지하 주차장의 경우 매층마다 시행

점검 시기	조사 항목	주요 점검 내용 및 시험방법	비 고
3차점검 (구조체 초기 -피로티층 또는 저층) 4차점검 (구조체 중기 -중간층) 5차점검 (지붕층 타설 전)	▪ 균열, 재료분리, 누수, 콜드조인트 발생여부 부재손상여부	- 거푸집 조립상태, 박리제 - 재료분리, 부재치수, 누수상태 - 균열조사도 작성, 구조 균열 및 진행성 균열 조사, 균열 보수 방법 제시	※기초등 콘크리트 비 파괴 검사 가능부위 비파괴조사시행
	▪ 철근공사	- LH 구조공통도 및 구조도면에 의한 간격, 위치, 피복, 이음, 정착길이, 결속, 스페이서(피로티있는 동의 50% 이상은 피로티층에 대해 육안에 의한 철근배근 점검, 잔여동의 30% 이상은 중간층에 대해 육안에 의한 철근 배근점검을 시행한다.)	잔여동 : 피로티층 육안에 의한 철근배근 조사 제외한 나머지동
	▪ 철근탐사	- 철근간격, 위치, 피복, 이음, 정착길이, 스페이서(수직·수평 부재별 층당 1회 이상으로 세대를 달리하여 조사하되 인접층과 동일 부위가 되지 않게 한다.)	-수직부재(기둥 또는 벽) 및 수평부재(보 또는 슬라브)에 대해 조사 하며, 보의 경우 전이보 등 중요부재에 한함 - 점검장비별 점검기준 및 방법을 준수하여 점검한다.
	▪ 콘크리트 비파괴검사	- 재료강도 - 반발경도, 초음파법, 자기법, 레이다법, 방사선법 (수직·수평 부재별 층당 1회 이상으로 세대를 달리 하여 조사하되 인접층과 동일부위가 되지 않게 한다.)
	▪ 구조부재의 치수 및 변위	- 부재별 치수조사 - 처짐 또는 변형발생 등	기둥, 벽, 보, 슬래브 부재별 5개층당 2개소 이상 치수조사
6차점검 (초기점검) (건축준공시)	▪ 균열, 재료분리, 누수, 콜드조인트 발생여부 부재손상여부	- 재료분리, 부재치수, 누수상태 - 균열조사도 작성, 구조 균열 및 진행성 균열 조사, 균열 보수 방법 제시
	▪ 철근탐사 (동별 3개층, 층당 2회이상)	- 철근간격, 위치, 피복
	▪ 콘크리트 비파괴검사 (동별 3개층, 층당 2회이상)	- 반발경도, 초음파법, 자기법, 레이다법, 방사선법
	▪ 외관조사망도 작성	- 구조물 전체에 대한 외관조사망도
	▪ 초기치 설정(동별)	- 건물기울기(측정가능한 4면의 모서리) 및 부동침하기울기(장변 및 단변방향 각2개소 이상)
	▪ 유지관리방안 제시	- 붕괴유발부재 등 파악, 효율적 유지관리방안제시
7차점검 (건설공사 준공 후 3개월 이내)	▪ 종합보고서 작성	- 기존 점검(1차～4차) 주요내용 정리, 조치결과
	▪ 적정성평가	- 보수․보강의 적정성 평가
추가조사	콘크리트 재료시험, 강재비파괴, 비파괴재하시험 등 추가조사 필요시 감독원 협의 후 시행

* 단, 국토부 고시 『건설공사 안전관리 업무수행 지침』 [별표 1] “정기안전점검 실시시기” 조정에 따라 점검내용은 가감될 수 있다.

**  아파트 건설공사 부대·복리시설(지하주차장, 복지관등)을 포함하여 점검

*** 무량판 지하주차장의 경우 전단보강근 설치 여부 및 도서와의 적정성 여부 등에 대한 별도 보고서를 작성하여 제출

【붙임 3】정기안전점검 보고서 목차

1. 개 요

∙ 점검대상물의 위치도

∙ 점검대상물의 전경사진

∙ 정기안전점검 실시결과 요약문

2. 정기안전점검의 개요

정기안전점검의 범위와 과업내용 등 정기안전점검 계획 및 결과와 관련된 주요사항을 기술한다.

∙ 점검목적

∙ 점검범위 및 과업내용

∙ 사용장비

∙ 정기안전점검 수행 일정

∙ 점검대상물의 개요

3. 품질, 시공상태 등의 적정성

과업 내용에 의거하여 조사, 시험하고 측정한 결과를 분석하여 점검 대상 구조물의 품질, 시공상태를 평가하고 결과를 작성한다.

∙ 시공상태의 적정성

∙ 품질관리의 적정성

4. 임시시설 및 가설공법의 안전성

과업 내용에 의거하여 임시시설 및 가설공법을 조사, 시험하고 측정한 결과를 분석하여 구조적․기능적 안전성을 평가한다.

∙ 일반사항

∙ 임시시설 및 가설공법

∙ 임시시설 및 가설공법의 분석․평가

5. 공사장 주변 안전조치의 적정성

공사장 주변 안전조치를 조사하고 그 결과의 적정성을 평가한다.

∙ 일반사항

∙ 공사 시 안전조치 사항

∙ 건설공사 소음, 진동 분진 방지 대책

∙ 조사결과

6. 건설공사 안전관리 검토

과업내용에 의거 실시한 건설공사 안전관리를 검토하고 적정성을 평가한다.

∙ 일반사항

∙ 안전관리계획 수립기준

∙ 조사결과

7. 조사결과의 처리

점검대상물의 상태평가와 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에 대하여 보수․보강방법을 제시한다.

∙ 결함조사 내용 및 결과처리

∙ 보수방안

8. 종합결론

∙ 종합의견

∙ 정기안전점검 결과표

∙ 향후 공사진행시 관리요망사항

9. 부록

∙ 안전점검 지적사항 조치자료

∙ 이전 점검에서 지적된 사항에 대한 조치사항

∙ 결함부위 조사도 및 사진

∙ 콘크리트 품질시험결과

∙ 균열 보수 재료

∙ 균열 보수 공법

∙ 배근간격 및 피복두께 허용오차 기준

∙ 균열의 원인 및 분류

∙ 안전진단전문기관 관련서류(등록증, 수료증, 자격증)

∙ 안전점검 참여기술자 실명제 명부(동별 책임기술자 및 참여기술자 서명)

【붙임 4】종합보고서 목차

1. 개 요

보고서의 표지에는 기 실시한 안전점검의 개략을 알 수 있도록 다음의 사항을 기술한다.

∙ 제출문

∙ 참여기술진 명단

∙ 보고서 목차

∙ 점검대상물의 위치도

∙ 점검대상물의 전경사진

2. 기 실시한 안전점검의 요약

기 실시한 안전점검의 범위와 과업내용 등 주요사항을 기술한다.

∙ 점검대상물의 개요

∙ 각 차수별 안전점검 실시현황 (점검기관명, 책임기술자명, 점검기간, 점검비용)

∙ 기 실시한 안전점검의 주요내용

3. 기 실시한 안전점검에 의한 조치사항 및 보수․보강 실시결과 확인․검토

∙ 안전점검에 의한 조치 결과의 확인

∙ 보수ㆍ보강 작업의 실시 및 작업결과의 확인

∙ 조치결과 및 보수․보강작업의 적정성 평가

∙ 기타 사항

4. 종합결론 및 건의사항

∙ 종합결론

∙ 미 조치사항 목록

∙ 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

∙ 기타 필요한 사항

5. 부 록

∙ 확인 사진

∙ 기타 참고자료

【붙임 5】정기안전점검 작업일지 (양식)

용 역 명 : OO지구 OOBL 아파트 건설공사 O공구

점검 현황

점검일자	2016년01월28일	날씨 : 맑음
구 분	내 용
금일 점검내용	- 000동 6층바닥철근배근 점검완료
명일 점검예정	- 000동 비파괴검사 및 벽체철근육안조사
장비 투입현황	- 철근탐사기, 슈미트해머, 줄자....
안전 점검결과	- 000동 3층 벽체 균열발생(보수필요) - 가설울타리 도면과 상이하게 시공
공사현황	- 000동 3층 타설완료, 000～000동 5층 타설완료, 000동 5층 슬라브 철근배근, 000동 6층 벽체철근완료

인력 투입현황

구분	조사일 (일)	총계획 (인)	투입 (인)	누계 (인)	점검자
1회	1.25일	50	10	10	책임기술자: 홍길동 참여기술자: 김선달 외 8인
2회	1.26일	50	10	20	“
3회	1.27일	50	20	40	“
4회	1.28일	50	10	50	“

㈜OO엔지니어링                    책임 기술자   홍 길 동 (인)

【붙임 6】정기안전점검 중간보고서 (샘플)

1. 작성시기 : 시설물별(동별) 현장점검 완료 후 7일 이내 제출,

2. 작성방법

1) 보고서 요약문 형태로 간략 표현

2) 공통적인 조사항목인 가설공사, 토공사 등은 최초 중간보고시에만 작성하며, 차기 보고시에는 특이사항 발생시만 작성

3) 부록 : (필요시)균열 등 결함사진, 비파괴조사결과 등 설명자료 첨부

Ⅰ. 점검개요

1. 공사개요

○ 공 사 명 : OO지구 OOBL 아파트 건설공사 O공구

○ 시 공 사 : (주)OO 건설, (주)OO 건설

○ 공사기간 : `22.00.00. ～ `22.00.00. [건축, 기계]
`22.00.00. ～ `22.00.00. [토목]

○ 점검기간 : `22.00.00. ～ `22.00.00. (101동 3차 점검)

2. 건설개요 및 구조설계 개요

1) 건설개요 (현장점검시점의 동별 공사내용을 간략하게 기재)

구분	동별	동	공사내용
공동주택	26+33-120-10F	101	2층 콘크리트 타설중
	26-80-10F	102	3층 콘크리트 타설중

2) 구조설계 개요 (동별 구조설계 개략 작성)

101동 구조설계 개요
기초종류	-기초종류 : 말뚝기초 PHC PILE D600 Ra-1900kN -기초두께 : 900mm
사용재료	철근	KSD 6504 SD 500 (fy-500 MPa) : D13mm 이하 SD 600 (fy-600 MPa) : D16mm 이상
	콘크리트	유형	부위	강도 (MPa)	골재 (mm)	슬럼프 (mm)
		구조체	지하층~최상층	24	25	150
			기초	24	25	80

102동 구조설계 개요
기초종류	-기초종류 : 기내력기초 fe=450kN/㎡ -기초두께 : 1,000mm
사용재료	철근	KSD 6504 SD 500 (fy-500 MPa) : D13mm 이하 SD 600 (fy-600 MPa) : D16mm 이상
	콘크리트	유형	부위	강도 (MPa)	골재 (mm)	슬럼프 (mm)
		구조체	지하층~최상층	24	25	150
			기초	24	25	80

3. 중간보고 대상시설물 점검개요(전체 대상시설물과 금번 보고대상물을 구분표기)

동별	층수 (PIT/지상)	형별 (TYPE)	세대수	점검내용	비고
101동	PIT/10	26+33	120	가설공사, 비파괴검사, 콘크리트공사, 철근공사 등	금회 점검
102동	PIT/10	26	80	-

Ⅱ.주요 점검결과표 (조사범위내 점검내용을 기재)

1. 공통사항 (정기안전점검 체크리스트를 참고하여 작성)

공종	조사 항목	세부항목	점 검 결 과	비고
가설 공사	비계 및 발판	비계용 자재의 규격과 상태	- 강관비계, 틀비계, 가설계단 자재 규격 : 강관(스틸) - 발판 :알루미늄 다공발판(폭 40cm) - 변형 없는 양호한 상태
		외부비계의 시공 상태	-지주 및 장선, 띠장 간격 1.8m 이하 -접합부 클램프 사용하여 고정상태 양호 -비계기둥 지지면 상태 양호
		외부비계와 구조물과의 연결 상태	구조물 거푸집과 연결, 가새로 지지되어 양호
		발판의 설치상태	알루미늄 다공발판(고리부착형) 장선과의 고정상태 양호
건설 기계	천공기
	항타·항발기
	타워 크레인

2. 101동 점검결과 (정기안전점검 체크리스트를 참고하여 작성)

공종	조사 항목	세 부 항 목	점 검 결 과	비고
철근콘크리트공사	자료수집	구조계산서, 철근 시공상세도 및 공사시방서 검토	양호	안전점검책임기술자 자료검토
		콘크리트공사 자체 안전점검표 유무	양호
		콘크리트(배합설계표 포함) 및 철근 강도시험(품질시험 성적서) 유무	양호
	거푸집	부위별 거푸집 조립도 작성 여부	미흡:지하층과 1층 필로티 수직 거푸집에 대한 조립도 없음	조립도 제작 및 확인 후 타설 지시
		거푸집 재질 및 상태	-지하층 1층 필로티 벽체. 기둥 및 보 : 유로폼 -슬래브 바닥 : 합판 -표면, 테두리 상태 양호
		부위별 거푸집 사용 횟수의 적정성	양호
		거푸집의 수직 및 수평상태	양호
		박리제 도포 상태	양호
		거푸집의 존치기간 준수 여부	미해당(타설 전)
		개구부 등의 정확한 위치	양호
		거푸집 하부 및 모서리 등의 조립상태	양호
	거푸집 지보공	지보공의 재질 및 상태	시스템 동바리(강관) 상태 양호
		지보공의 이음부, 접속부, 교차부 연결 및 고정상태	양호
		지보공 설치 간격의 적정성	양호:설계기준 만족(설치간격 910mm*1,200mm)
		경사면에서의 지보공 수직도와 base plate 정착 상태	양호
		지보공의 침하방지 조치	미해당(구조체에 시공)
		파이프 지보공 연결 시 전용철물 사용 여부	미해당
	갱폼	구조체와 갱폼 하부의 고정용 앵커 체결 상태	양호
		갱폼 상부 매립 앵커 설치 상태	양호
		갱폼 외부 전도방지용 와이어로프 상태(바닥슬래브 매립앙카에 고정 상태)	양호(00m간격 00개소)
		작업발판 변형 및 적재 상태	양호
	철근공사	가공제작 도면의 작성 여부	양호:배근도를 토대로 슬래브, 보, 철근, 벽제, 다우얼 철근 샵드로잉 작성
		철근절단부 및 개구부 등 보강여부(구조도면 및 LH 구조공통도)	미해당
		부재별 철근배근 간격(보, 슬라브의 경우 단부(주열대), 중앙부(중간대)로 간격 확인)	-양호:슬래브, 보(주근), 벽체, 기둥 -미흡:스터럽 간격 미확보	현지시정
		철근강도 및 위치 확인	양호 : D16, D19(SD600)
		부재별 피복두께	-양호:슬래프 상하부 30mm 확보 -미흡:보 하부 스터럽 고임대 일부 파손으로 피복두께 미확보	현지시정
		이음길이, 이음위치의 적정성	양호
		정착길이, 방법의 적정성	양호
		스페이서 재질(품질시험 성적서 포함)과 설치간격	양호
		철근 교차부위의 결속상태	-양호:배근간격 240mm 하나 걸러 결속 -미흡:스터럽과 주근 결속 미비	현지시정
		신축이음 부위, 지하층의 배근방법 및 상태	양호
	콘크리트공사	콘크리트 타설 속도와 방법	양호:배부름 없음
		슬럼프 테스트 유무	양호:160~170mm
		골재분리 및 균열의 발생여부	양호
		균열조사도 작성(구조균열 및 진행성 균열조사), 균열보수 방법제시	미해당
		콘크리트 다짐상태	양호:곰보, 침하성 결함 없음
		콘크리트 타설전 청소상태	양호
		이어치기 위치 및 방법의 적정성(계획과 현장 시공상태 일치여부 확인 등)	양호:도면 일치
		콘크리트 양생 시 보호조치(계획과 현장 시공상태 일치여부 확인 등)	양호:보양막 내부온도 18~20도, 온도 균열 없음
		기초두께, 부재치수, 부재손상여부 조사	양호
		누수상태	양호
		콜드조인트 발생여부	양호
		구조물에 매설되는 배관의 위치 및 피복두께	양호:도면, 시공 일치
		콘크리트의 강도조사	양호:28일 평균압축강도 29.8MPa(설계기준강도 24MPa)
	콘크리트비파괴검사	재료강도, 반발경도, 초음파법, 자기법, 레이다법, 방사선법 [기초, 기둥, 벽, 보, 슬래브 등 부재별 층당 2회 이상으로 세대를 달리하여 조사하되 인접층과 동일부위가 되지 않게 한다.(보의 경우 전이보 등 주요부재에 한함)]	양호:(슈미트해머) 24.1~38.0MPa(설계기준 24MPa)
	철근탐사	철근간격, 위치, 피복 [기초, 기둥, 벽, 보, 슬래브 등 부재별 층당 2회 이상으로 세대를 달리하여 조사하되 인접층과 동일부위가 되지 않게 한다.(보의 경우 전이보 등 주요부재에 한함)]	양호 -배근:배근간격 및 수량 만족 -피복:벽체 26~34mm, 슬래브 26~35mm, 기둥 48~52mm
	구조부재의 변위	벽체 수직도, 처짐, 변형 발생 등	양호 : 6F 수직기울기 89.9°~90.0°(0.00~4.89mm), 층간허용오차 6mm

Ⅲ. 점검결과 중간보고 총평(101동 2차점검)

(개괄식으로 점검사항 서술)

101동 2차 정기안전점검 실시 결과, 기초 시공 실태 및 품질관리 상태가 적정하고, 임시시설 및 가설공법의 안전성이 확보된 상태이며, 공사장 주변 안전조치 상태도 적정한 상태로 판단됨.

철근콘크리트 공사에서는 전반적으로 양호하나, 거푸집(지하층과 1층 필로티 수직 거푸집 조립도 없음), 철근공사(스터럽 간격, 피복두께, 결속 미비)에서 미흡함이 발견되어 시정하였음.(수직 거푸집 제작도 확인 후 타설 지시)

특이사항으로 102동 인접 흙막이 벽의 굴착부분은 당초 굴착면 복구 전 까지는 지하수 유출상태와 잔여 굴착면 상태를 자체 안전점검 시 지속적으로 주의 관찰 할 필요가 있음.

㈜OO엔지니어링                    책임 기술자   홍 길 동 (인)

【붙임 7】정기안전점검 현장점검 확인서 (양식)

구분	항 목	점검 회차	점검일시	점 검 자		확 인 날 인
				기술등급	성 명	감독(감리)	시공사
건설 기계	타워크레인1	설치	2024.00.00
	타워크레인1	인상1	2024.00.00
	타워크레인1	인상2	2024.00.00
	타워크레인1	해체	2024.00.00
	타워크레인2	설치	2024.00.00
	타워크레인2	인상1	2024.00.00
	타워크레인2	해체	2024.00.00
	...	...	...
흙막이	흙막이	1차	2024.00.00
	흙막이	2차	2024.00.00
갱폼	101동	1차	2024.00.00
	101동	2차	2024.00.00
	102동	1차	2024.00.00
	102동	2차	2024.00.00
	103동	1차	2024.00.00
	103동	2차	2024.00.00
	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

【붙임 8】정기안전점검 보고서 인수·인계서 (양식)

정기안전점검 보고서 인수․인계서

OO지구 아파트 건설공사 O공구의 정기안전점검 O차 점검을 완료하고 보고서(3부, CD1부)를 인수․인계하였음을 확인함

※ 점검일 : 00.00.00일 ~ 00년00.00일

년       월    일

인계자 OO엔지니어링 대표이사               (인)

인수자 OO건설 현장대리인                   (인)

【붙임 9】정기안전점검 체크리스트

* 점검 시 관련도면(구조 등), LH 구조공통도, 공사시방서 등을 숙지하여 점검 시행

점검시기	공종	조사항목	세부항목	비고
공통	안전관리 계획서	안전관리계획서	총괄 안전관리 계획서의 적정 이행여부(현장일치여부 확인)
		대상 시설물별 세부 안전관리계획	공종별 안전관리 계획서의 적정 이행여부(현장일치여부 확인)
	품질관리 (시험)계획서	품질관리(시험)계획서	품질관리(시험) 계획서의 적정 이행여부
		품질시험 기준	주요자재(레미콘, 철근, 단열재, 추락방지망, 낙하물 방지망 등) 품질시험 결과의 시방기준 만족여부 및 가설기자재 안전인증(안전보건기술지침) 만족여부
	공사장 주변 안전조치	자료수집	안전관리 계획서 유무
			공사현장 인접구조물 사전조사 보고서 유무
			인접구조물 계측관리 보고서 유무
			공사현장 및 인접구조물 자체 안전점검표 유무
		공사현장	현장 주변의 정리․정돈상태
			현장 출입방지 시설의 상태
			현장주변의 표지류 상태
		인접구조물	인접구조물 현황 파악 상태(피해 예상건축물 및 구조물의 관리현황)
			인접구조물의 피해발생 여부 및 피해발생 시 대책
			작업방식,공법에 따른 안전대책의 수립여부와 적정성
	굴착공사	굴착공사	지반의 종류에 따른 굴착높이 및 구배의 준수여부(사면 안정성)
			굴착예정지의 실지조사 여부 -지형,지질,지하수위,암거,지하매설물상태, -주변시설물,전주,가공선의상태, -유동성물질의상태
			다음에 대한 계획의 수립여부 및 적정성 -지하 매설물의 방호 및 인접 시설물 보호 -굴착 순서, 굴착면의 경사 및 높이 -건설기계의 종류 및 점검, 높이
			굴착공사 자체 안전점검표 유무
			발파 굴착 시 화약 보관상태, 전기발파 시 누전여부의 확인
		배수 및 계측관리	계측 항목별 계측관리계획의 적정성
			계측관리계획의 현장 실행상태 확인
			계측 항목별 계측관리상태의 적정성
	성토 및 절토공사	흙쌓기 공사	원지반의 유해물 제거여부
			흙쌓기 부위의 다짐상태
			배수시설 설치상태
			흙쌓기면의 함수비
			흙쌓기 재료의 적정성
		흙깎기 공사	시공전․후 현장상태의 기록 보관유무
			지질조사 및 지하 매설물의 검토 확인여부
			지하 매설물의 보호대책 수립여부
			비탈면 배수시설의 적정성
			비탈면 구배의 안전성
	가설구조물	가설계획	가설구조물[울타리, 방음벽, 동바리(잭서포트 포함), 거푸집(G/F, A/F, 유로폼), 비계 등 영 제101조의2 가설구조물 포함] 구조설계계산서 검토 및 구조설계계산서와 시공 상태 일치 여부
			가설구조물[울타리, 방음벽, 동바리(잭서포트 포함), 거푸집(G/F, A/F, 유로폼), 비계 등 영 제101조의2 가설구조물 및 추락방지시설, 낙하물 방지시설, 안전난간] 시공상세도면 유무 및 시방서 규정준수 여부
			가설공사 자체 안전 점검표 유무
			가설공사 계획의 적정성
			가설물의 형식과 배치계획의 작성 여부
			가설재 안전인증 및 재사용 가설기자재 등록여부 확인 및 표본조사 실시 (확인서류 : 안전인증서, Kc마크각인여부, 재사용등록증, 등록업체 유효기간, 등록 물품 리스트 등)
		울타리, 방음벽	시공상세도와 현장시공 일치여부(사용자재, 규격 및 설치간격, 접합부 시공상태 등)
			시공상태 하자유무(변형, 침하, 균열, 기울어짐 등)
			구조계산서 여부 및 현장 여건 적합 여부 검토
		비계 및 발판	비계용 자재의 규격과 상태
			외부비계의 시공 상태 (지주․띠장간격, 가새, 기둥 밑받침 및 밑잡이)
			외부비계와 구조물과의 연결 상태
			발판의 설치 상태 (재질,틈,고정)
			비계용 브라켓을 사용할 때 브라켓의 고정상태 및 강도
			틀비계의 전도 방지 시설
		호이스트	호이스트 안전점검표 확인
			안전검사 실시여부 (수시, 정기)
			호이스트 운행구간 장애물 제거 여부
		안전난간, 추락방지시설 등	안전관리계획서에서 정한 항목
		낙하물 방지망	낙하물 방지시설 재료의 규격과 상태
			낙하물 방지망의 돌출길이 및 설치 각도
			벽면과 비계사이에 낙하물 방지망의 설치 상태
		공사차량 통과하중(잭서포트)	공사차량 통과 현황 유무
			차량 통과 하부건축물 안전성 검토 보고서 유무
			잭서포트 설치 위치 및 설치 상세도 유무
			잭서포트 규격 및 설치 간격 확인
			잭서포트 변형상태 확인
			잭서포트 베이스 플레이트 및 콘크리트 지압부 상태 확인
			차량통과 부위 콘크리트 균열 및 변형 유무 확인
		흙막이	흙막이 가시설 구조설계계산서 유무
			흙막이 가시설 시공상세도 및 시공시방서 유무
			흙막이 가시설 계측관리계획서 및 계측관리 보고서 유무
			조립상세도의 적정성 여부
			시공시 부재의 품질, 토질 및 수압 등의 고려 여부
			보일링 또는 히이빙의 발생 또는 위험 여부
			부재연결 부분의 상태
			누수 및 토사의 유출여부
			버팀목 및 흙막이판의 조립상태
			지보공 주변 지반면의 균열 상태
	건설기계	천공기(높이 10미터 이상), 항타 및 항발기	작업절차서의 적정성 검토(지지력 확인, 전도방지조치 등)
			동력전달장치, 조종장치, 작업장치 구조, 주행장치, 제동장치, 유압기계장치 적합여부(증빙자료 확인)
		타워크레인	타워크레인 안전점검표 및 위험성평가표 확인
			타워트레인 작업계획서 확인 및 검토
			마스트 지지대 및 구조체 연결 부위 시공 적정성
			안전검사 실시여부(수시, 정기)
			타워크레인 기초 및 앵커 점검(기초앵커 증명서, 구조검토서, 지내력조사 서류 확인)
			마스트 설치, 연장, 해체 작업 시 적정 실시 여부(표준작업인원, 계획서 및 작업절차 준수) 입회 점검
			노후 장비 안전성 확인 (15년 이상 타워크레인 현장 설치 전 비파괴검사, 안전검사 등 실시 여부 확인)
			작업발판, 난간 견고성 및 볼트고정상태 확인
			특별안전보건교육 실시 여부(설치·상승·해체 시) 확인
			설치·상승·해체작업 영상 기록 및 보존 여부 확인	산업안전보건법 시행규칙(제49조~제50조, 별표8 및 별표8의2) 설치·상승·해체작업 전반을 영상으로 기록하여 보존하고, 사용 중에는 장비나 인접구조물등과의 충돌위험이 있으면 충돌방지조치를 하여야 한다.(‘18.3.29 시행)
1차 기초공사시공시 (콘크리트 타설 전)	지정 및 기초공사	자료수집	말뚝시공상세도(근입깊이 및 배치) 및 시공시방서 유무
			기초공법 적정성
			지반조사보고서 및 관련 구조계산서검토(도면일치여부 확인 등)
			말뚝 시공 기록지(항타일지 등) 유무
			항타기 및 항발기, 천공기 등 건설기계 점검체크리스트 및 자체점검표, 등록증, 정기점검결과서 확인
		말뚝 기초	사용자재 및 규격 확인
			두부정리상태, 균열, 편심, 보강타 확인
			배치간격 및 개수 확인
			근입깊이 확인
			말뚝재하시험 결과 확인 및 소요지지력 확보 여부
		지내력 기초	잡석 지정 또는 버림콘크리트 시공 상태
			평판재하시험 결과 확인 및 소요지지력 확보 여부
	철근콘크리트공사 (콘크리트 타설 전)	자료수집	구조계산서, 철근 시공상세도 및 공사시방서 검토
			콘크리트공사 자체 안전점검표 유무
			콘크리트(배합설계표 포함)및 철근 강도시험(품질시험 성적서) 유무
		거푸집(설치부위에 한함)	부위별 거푸집의 조립도 작성 여부
			거푸집의 재질 및 상태
			부위별 거푸집 사용 횟수의 적정성
			거푸집의 수직 및 수평 상태
			박리제 도포 상태
			거푸집의 존치기간 준수 여부
			개구부 등의 정확한 위치
			거푸집 하부 및 모서리 등의 조립상태
		거푸집 지보공(설치부위에 한함)	지보공의 재질 및 상태
			지보공의 이음부, 접속부, 교차부 연결 및 고정상태
			지보공 설치 간격의 적정성
			경사면에서의 지보공 수직도와 Base Plate 정착상태
			지보공의 침하방지 조치
			파이프 지보공 연결시 전용철물 사용 여부
		철근공사 (차수별 현장점검 시 철근배근 육안검사 병행 시행)	가공제작 도면의 작성여부
			집수정, 트렌치 등 철근보강 여부(구조도면 및 LH 구조공통도)
			부위별(기둥하부 보강부 및 기초 보강부 등)철근배근 간격
			철근강도 및 위치 확인
			부재별 피복두께
			이음길이, 이음위치의 적정성
			정착길이, 방법의 적정성
			스페이서 재질(품질시험 성적서 확인)과 설치간격
			철근 교차부위의 결속상태
			신축이음 부위
2차 지하층 철근배근 완료 후 (콘크리트 타설 전)	철근콘크리트공사 (콘크리트 타설 전)	철근공사 (차수별 현장점검 시 철근배근 육안검사 병행 시행)	가공제작 도면의 작성여부	※ 지하층 철근배근 완료시 점검하되 무량판 지하 주차장의 경우 매층마다 시행
			지하층 철근보강 여부(구조도면 및 LH 구조공통도)
			부위별(기둥하부 보강부 및 기초 보강부 등)철근배근 간격
			철근강도 및 위치 확인
			부재별 피복두께
			이음길이, 이음위치의 적정성
			정착길이, 방법의 적정성
			스페이서 재질(품질시험 성적서 확인)과 설치간격
			철근 교차부위의 결속상태
			신축이음 부위
<3차~5차> 3차 : 구조체공사 초기단계 (피로티층 또는 저층) 시공 시 4차 : 구조체공사 중기단계 (중간층) 시공 시 5차 : 구조체공사 말기단계 (지붕층 타설전) 시공시	철근콘크리트공사 (콘크리트 타설 전 및 타설 후)	자료수집	구조계산서, 철근 시공상세도 및 공사시방서 검토
			콘크리트공사 자체 안전점검표 유무
			콘크리트 및 철근 강도시험(품질시험 성적서) 유무
		거푸집	부위별 거푸집의 조립도 작성 여부
			거푸집의 재질 및 상태
			부위별 거푸집 사용 횟수의 적정성
			거푸집의 수직 및 수평 상태
			박리제 도포 상태
			거푸집의 존치기간 준수 여부
			개구부 등의 정확한 위치
			거푸집 하부 및 모서리 등의 조립상태
		거푸집 지보공	지보공의 재질 및 상태
			지보공의 이음부, 접속부, 교차부 연결 및 고정상태
			지보공 설치 간격의 적정성
			경사면에서의 지보공 수직도와 Base Plate 정착상태
			지보공의 침하방지 조치
			파이프 지보공 연결시 전용철물 사용 여부
		갱폼	구조체와 갱폼 하부의 고정용 앵커 체결 상태
			갱폼 상부 매립 앵커 설치 상태
			갱폼 외부 전도방지용 와이어로프 상태(바닥슬래브 매립앙카에 고정 상태)
			작업발판 변형 및 적재 상태
		철근공사 (차수별 현장점검 시 철근배근 육안검사 병행 시행)	가공제작 도면의 작성여부
			철근절단부 및 개구부 등 보강여부(구조도면 및 LH 구조공통도)
			부재별철근배근 간격(보, 슬래브의 경우 단부(주열대), 중앙부(중간대)로 간격 확인)
			철근강도 및 위치 확인
			부재별피복두께
			이음길이, 이음위치의 적정성
			정착길이, 방법의 적정성
			스페이서 재질(품질시험 성적서 포함)과 설치간격
			철근 교차부위의 결속상태
			신축이음 부위, 지하층의 배근방법 및 상태
		콘크리트공사	콘크리트 타설 속도와 방법
			슬럼프 테스트 유무
			골재분리 및 균열의 발생여부
			균열조사도 작성(구조균열 및 진행성 균열조사), 균열보수 방법제시
			콘크리트 다짐상태
			콘크리트 타설 전 청소상태
			이어치기 위치 및 방법의 적정성(계획과 현장시공상태 일치여부 확인 등)
			콘크리트 양생 시 보호조치(계획과 현장시공상태 일치여부 확인 등)
			기초두께, 부재치수, 부재손상여부 조사
			누수상태
			콜드조인트 발생여부
			구조물에 매설되는 배관의 위치 및 피복두께
			콘크리트의 강도조사
		콘크리트 비파괴 검사	재료강도, 반발경도, 초음파법, 자기법, 레이다법, 방사선법 [기초, 기둥, 벽, 보, 슬래브 등 부재별 층당 2회 이상으로 세대를 달리하여 조사하되 인접층과 동일부위가 되지 않게 한다.(보의 경우 전이보 등 주요부재에 한함)]
		철근탐사(철근배근 육안검사 시행구간 제외)	철근간격, 위치, 피복 [기초, 기둥, 벽, 보, 슬래브 등 부재별 층당 2회 이상으로 세대를 달리하여 조사하되 인접층과 동일부위가 되지 않게 한다.(보의 경우 전이보 등 주요부재에 한함)]
		구조부재의 변위	벽체 수직도, 처짐, 변형 발생 등
초기점검 (준공직전)	기본조사	1~4차 점검사항(해당 시)	1~4차 조사항목 중 진행 중인 조사항목 또는 관찰이 필요한 항목 점검
		구조물 전체에 대한 외관 조사망도 작성(필수)	향후 유지관리 및 점검, 진단에 필요하므로 세밀하게 기록
		초기치 설정(필수)	주요 내,외부 기둥의 기울기 및 주요바닥부재 처짐 등 향후 유지관리 및 점검, 진단에 필요하므로 세밀하게 기록 [동별 건물기울기(측정가능한 4면의 모서리) 및 부동침하기울기(장변 및 단변방향 각2개소 이상)]
		유지관리방안 제시	붕괴유발부재(내력벽, 기둥 등) 파악 및 유지관리방안 제시
		콘크리트 비파괴 검사	재료강도, 반발경도, 초음파법, 자기법, 레이다법, 방사선법 [동별 3개층(지하층, 중간층, 상부층), 층당 2회 조사하되 기존 조사층과 동일 부위가 되지 않게 한다]
		철근탐사	철근간격, 위치, 피복 [동별 3개층(지하층, 중간층, 상부층), 층당 2회 조사하되 기존 조사층과 동일 부위가 되지 않게 한다]
종합 보고서 작성	종합보고서	종합보고서 작성	기존 점검 주요정리, 조치결과
		적정성 평가	보수, 보강의 적정성 평가
		기타사항	미조치사항 및 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항
추가조사	추가조사 (필요시) *감독 사전협의 후 시행	콘크리트 재료시험	코아채취, 강도, 성분, 공기량, 염화물 함유량 시험 등(비파괴검사 결과 소요강도 부족 시)
		강재비파괴 시험	방사선투과, 자분탐상, 침투탐상, 초음파탐상
		비파괴 재하시험	정적, 동적 재하시험
		지질조사	시추, 시굴, 코아채취, 공내시험, 암반강도시험 등
		지반조사 및 탐사	시추 또는 오거보링, 공내시험, 시료채취, 토질시험 GPR 탐사, 지하공동, 지층분석 등
		구조, 지반 수리해석	구조, 지반 수리해석
		전문가 자문	구조안전성평가 등 전문기술을 요하는 경우 전문가 자문
		계측 및 측량	구조물 상태 및 변위파악을 위한 계측, 토압측정, 변위측량 등

<유의사항>

1) 육안검사 결과는 시공업체, 감독원에게 즉시 보고

2) 점검차수와 관계없이 조사 항목에 해당될 경우 조사 실시(건설기계, 가설구조물 등)

3) 점검결과는 도면 또는 계획서 등에 의하여 점검 내용을 육하원칙에 의거 기술